문서번호	설비부-1873
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	02/11 박기형

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』

설계변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

[건축설비과]

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』

설계변경 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사』와 관련하여 책임감리원으로부터 시공수량 증·감 및 보험료 정산 등 설계변경 검토보고가 있어 아래와 같이 보고 드림.

관련근거

○ 감리15-137(‘15.02.11)

- 정산 설계변경 검토보고(경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사)

○ ASANIT 20*******06호(‘15.02.10)

- 설계변경 요청(총차 및 1,2차)

공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 통신공사

○ 규    모 : 공원조성구간 1.9km, 방송 및 영상 배관·배선 1식, 제어반 2면

○ 계 약 자 : 아산정보통신(주), 대표 홍수길

○ 공사기한 : 2013.10.10. ~ 2015.02.15.

○ 계약금액 : 235,377,000원

○ 감 리 단 : ㈜유신, 책임감리원 윤상렬

보고내용

○ 변경 사업비

(금액 :원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
총 공사비	235,377,000	231,553,000	(감)3,824,000
1차공사	210,304,000	206,480,000	(감)3,824,000
2차공사	25,073,000	25,073,000	-

○ 설계변경 사유

- 노원구청 요청 및 협의사항에 따른 실 시공 수량 정산변경

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제1장 7절 사후정산에 따른 보험료(건강,   연금, 노인) 및 퇴직공제부금비 등 정산 설계변경

○ 설계내역 변경현황

구 분	단위	당 초	변 경	증·감	비 고
통합제어공사
광케이블내외관 일체형 전선관	m	1,839	1,759	(감)80	순공사비 감)1,334천원
2. 방송공사
폴리에틸렌 전선관 (PE 28m)	m	777	857	(증)80	순공사비 증)320천원
폴리에틸렌 전선관 (PE 42m)	m	1,111	1,031	(감)80	순공사비 감)379천원
3. CCTV공사
폴리에틸렌 전선관 (PE 28m)	m	1,512	1,752	(증)240	순공사비 증)961천원
폴리에틸렌 전선관 (PE 42m)	m	587	507	(감)80	순공사비 감)379천원
4. 노원구청 자가망	식	1	1	-	순공사비 증)104천원
소 계					순공사비 감)707천원

○ 공사비 변경현황(총차)

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
순공사비	142,273	141,566	(감)707
2. 간접노무비	8,208	8,211	(증)3
3. 산재보험료	3,435	3,436	(증)1
4. 고용보험료	733	733	0
5. 건강보험료	1,439	1,435	(감)4

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
6. 노인장기요양보험료	94	93	(감)1
7. 연금보험료	2,107	2,008	(감)99
8. 퇴직공제부금비	1,946	298	(감)1,648
9. 산업안전보건관리비	3,525	3,073	(감)452
10. 기타경비	9,472	9,427	(감)45
가. 순공사원가	173,232	170,280	(감)2,952
나. 일반관리비	10,394	10,217	(감)171
다. 이윤	18,283	17,936	(감)330
라. 설계비	12,070	12,070	0
① 공급가액	213,979	210,503	(감)3,476
② 부가가치세	21,398	21,050	(감)348
③ 도급액	235,377	231,553	(감)3,824

담당자 검토의견

○ 『경춘선 폐선부지 공원화 전기공사 』책임감리원의 『시공 수량 및 보험료 등 정산설계변경 검토보고』건에 대한 검토 결과 적합하다고 판단되어 설계변경 후 처리코자 함.

○ 건설총괄부에 계약변경의뢰를 시행코자 합니다.  끝.

붙임 :  1. 감리단 검토의견서    1부. 끝.