문서번호	하천관리과-2206
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	02/11 정중곤
협조

방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고

2015. 02

도 시 안 전 실

(하천관리과)

방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역

설계변경 검토 보고

기상 이변 및 집중호우에 대비코자 시행중인「방재시설 능력향상   기본 및 실시설계용역」관련, 사업계획 일부 변경에 따른 설계변경   내용을 검토하고 결과를 보고

Ⅰ		용역개요

○ 용 역 명 : 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계용역(염창1, 행당)

○ 계약기간 : 2013. 11. 13 ~ 2015. 02. 12

○ 계약금액 : 512,080천원

○ 계 약 자 : ㈜제일엔지니어링 외 1개사

○ 과업내용 : 빗물펌프장 시설용량을 30년 빈도에 맞게 증설

Ⅱ		추진현황

○ ‘13. 11. 13 : 설계용역 계약 및 착수

○ ‘13. 12. 30 : 착수보고회 개최

○ ‘14. 04. 30 : 1차 자문회의

○ ‘14. 05. 29 : 2차 자문회의

○ ‘14. 07. 28 : 기본설계(안) 보고

※ 자양4(증설 불필요), 금호(사업효과 미흡으로 행당펌프장으로 교체)

○ ‘14. 11. 06 : 서울시 경관심의

○ ‘14. 12. 04 : 행당빗물펌프장 기본설계(안) 자문회의

○ ‘15. 01. 30 : 최종 자문회의

Ⅲ		설계변경 검토

□ 변경사유

○ 사업계획 변경에 따른 설계비 정산(당초 158억 → 변경후 122억)

- 자양4 빗물펌프장 : 기본계획 검토 후 30년 빈도 확보되어 용역 타절

· 기초자료 조사 및 관련계획 검토비용 정산

- 금호 빗물펌프장  : 기본계획 검토후 사업비 대비 효과 미흡으로 용역 타절

· 기초자료 조사 및 관련계획 검토 + 내수처리계획 수립비용 정산

- 행당 빗물펌프장 : 과업대상 추가(기존 10년 → 30년 빈도 증설)

※ 당초(자양4, 금호, 염창1펌프장) → 변경후(염창1, 행당펌프장)

○ 기타 지반조사비 및 자문비 정산내용 반영

□ 변경내역

구 분	당 초	변 경 후	증·감	변경사유
측량비	6,418,536	6,418,536	-
지반조사비	9,078,861	13,474,630	증)4,395,769	물량 정산
설계비	440,821,518	438,799,107	감)2,022,411	과업내용 변경
자문비	4,500,000	2,025,000	감)2,475,000	실비 정산
손해배상보험료	4,780,000	4,810,000	증)30,000	설계비 대비 정산
공급가액	465,527,273	465,527,273	-	71,642원 절사
부가세	46,552,727	46,552,727	-
총 계	512,080,000	512,080,000	-

※ 설계비(1,331천원) 증액이 필요하나, 계약금액 내에서 내역 변경후 증액없이 정산

□ 설계비 산출내역

구 분	당 초	변 경 후	증·감	비고
기본 및 실시 설계비	440,821천원 공사비15,827백만원× 설계요율 3.25%×낙찰율	344,438천원 공사비12,272백만원× 설계요율 3.25%×낙찰율	감)96,383천원
관련계획 검토(타절분)	-	94,360천원	증)94,360천원	낙찰율 86.36%
계	440,821천원	438,7988천원	감)2,023천원

※ 관련 계획 검토분은 수자원개발 표준품셈 제14장 3절 배수펌프 시설계획 적용

Ⅳ		조치 의견

○ 상기 내용과 같이 설계변경 시행하여 재무과에 계약 변경 의뢰

붙임 : 1) 설계변경내역서 1부.  끝.