보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	02/16 최명익
협 조

문서번호 :	급수운영과-3755

광진구상수도공사 감독업무 수행중 ************** 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2015. 2. 16.

보고자 : ***********************

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	************	***	2015.2.10.~2.16	신설-14

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	************	***	신축현장 타공정(비계철거) 지연	2015.2.27

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	************	***	2015.2.10.~2.16	2015.2.10.~2.27

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 1부(따로붙임).  끝.