문서번호	기전설비2과-3841
결재일자	2013.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비2과장	한강사업본부장
백민	김두석	09/12 한국영
협 조

달빛무지개분수 CCTV 정비계획

한강사업본부 (시설부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

달빛무지개분수 CCTV 정비계획

낙뢰 등으로 인해 기능이 상실된 달빛무지개분수의 CCTV 2대 및 DVR 등 분수설비 감시장비를 낙뢰 보호기능이 포함된 국산제품으로 교체 설치함으로써 예산절감 및 유지보수의 용이성을 제고하고자 함

※ 관련근거 : 달빛무지개분수 유지관리 실태보고 (부장방침 / ‘13.8.7)

□  추진개요

○ 교체대상 : 달빛무지개분수 CCTV 및 DVR

- CCTV : 2대 (분수 노즐감시용 CCTV)

- DVR  : 1대 (영상 수신 및 배분장치, 위치 : 분수운영실)

○ 교체기간 : ‘13. 9. 16 ~ 9. 30

○ 소요예산 : 약 17,000천원

- CCTV : 8,000천원 × 2대 = 16,000천원

- DVR  : 1,000천원 × 1대 =  1,000천원

○ 계약방법 : 수의계약 (노바AV – 달빛무지개분수 시공업체)

- 동 업체는 동 CCTV 교체와 관련한 물가조사시 가장 저렴한 가격을 제시하였으며,

- 당초 달빛무지개분수 CCTV 시스템 구축업체로서, 신규에 설치될 장비의 기존 시스템과의 호환성 부분을 고려할 때, 동 업체에서 수행하는 것이 유리할 것으로 판단됨

□  교체장비 검토

구 분		1 안 (Pan/Tilt 타입)		2 안 (PTZ 타입)	3 안 (PTZ 타입)	비 고
		조 립 형		일 체 형
제품명	카메라	SCB-4000 (삼성테크윈)		LT913N-B (LG)	MIC-400 (BOSCH-기존제품)
	렌 즈	2MG-1031DP (코알)
	팬틸트	EPT-5000S (유진시스템)
개요	촬상소자	1/2“ CCD		1/4“ CCD	1/4“ CCD
	화 소	41만 화소		41만 화소	41만 화소
	렌 즈	10~310 mm		3.5~129.5 mm	3.5~122.4 mm
	최저조도	0.000001 Lux		0.001 Lux	0.1 Lux
장단점	성능측면	CCD가 커서 선명한 영상 촬영 가능 렌즈배율이 커서 장거리 촬영에 적합 최저조도 낮아 어두운 곳에도 영상 선명 국산제품으로 부품 수급이 완활 외산제품에 비해 가격이 저렴		CCD가 작아 비교적 좁은 공간에 적합 렌즈배율이 낮아 비교적 근거리에 적합 비교적 어두운 곳에서 촬영 가능 국산제품으로 부품 수급이 완활 외산제품에 비해 가격이 저렴	CCD가 작아 비교적 좁은 공간에 적합 렌즈배율이 낮아 비교적 근거리에 적합 최저조도 높아 어두운 곳 촬영 어려움 외산제품으로 고가이며 유지관리시 부품 수급에 어려움을 초래할 수 있음
	관리측면
소요비용		8 백만원 (대당)		5 백만원 (대당)	12 백만원 (대당)
추 천		◎

덧 붙 임 : 관련 방침서  1부 . 끝.