문서번호	자원순환과-12036
결재일자	2014.8.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	08/12 최홍식
협조

마포자원회수시설 에너지 회수 및 성능 개선 사업

기본계획 용역 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8. 11.(월)

기후환경본부

(자원순환과)

작 성 자	자원순환과장 :최홍식☎2133-3670 자원회수시설팀장 : 정연구☎3680 담당 :유영춘☎3681

마포자원회수시설 에너지 회수 및 성능개선 사업

기본계획 용역 추진 계획

마포자원회시설 소각로 성능을 개선하여 에너지 회수 및 소각량을 증대하고 생활폐기물 처리 환경 변화에 능동적으로 대처하고자 기본계획 수립 용역을 시행코자함

1		추진 근거

○ 추진근거 : 서울시 폐기물처리 혁신계획(시장방침 45, ‘14.3.6)

생활폐기물 직매립 최소화 대책(부시장방침 148, ‘13.4.2)

○ 수도권 매립지 금지 대비 자체 처리기반 구축 필요에 따른 추가 소각량 확보

- 시설 개선을 통한 소각 용량 100톤/일 확보

※ 신규 소각시설 설치는 입지선정․주민 민원․공사기간 장기화(7년) 등으로 어려움

2		사업 개요

□ 시설현황

○ 시설위치 : 마포구 하늘공원로 86(상암동)

○ 시설용량 : 750톤/일(250톤/일×3기)

○ 가동현황 : ‘13년 소각량 645톤/일(가동률 86%)

○ 소각형식 : 스토커 + 로타리킬른 방식

○ 최초가동일 : ‘05.06.

□ 개선 내용

○ 소각용량 증대 : 100톤/일(645톤/일 → 745톤/일)

○ 소각형식 변경 : 스토커 + 로터리킬른 → 스토커방식

○ 주요개선내용

- 소각로 개선사업

․ 기존 화격자 교체 및 3단 연장 (기존 5단 → 개선 후 8단)

․ 소각로 연소실 증가에 따른 구조 변경 (로타리킬른 제거)

․ 로타리 킬른 및 바이패스 덕트 철거로 연소실 확대(198㎥→260㎥)

- 여열회수사업

․ 연소실 측벽 수관벽 및 Wear Zone 설치

․ 보일러 수관벽 및 폐열보일러 보완

․ 증기생산량 증대(20% 증가)로 열 및 전력 등의 에너지 판매 증가

○ 소요예산 : 38,810백만원 (시비 33,149, 국비 5,661백만원)

3		추진 계획

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 마포자원회수시설 에너지 회수용 성능개선사업 기본계획 수립용역

○ 추정가격 : 20,000천 원

○ 용역기간 : 계약일로부터 50일간

○ 계약방법 : 수의계약

○ 근거법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제5호(추정가격 5천만 원 이하)

○ 수의계약 사유 : 추정가격 2천만 원 이하로 소액

□ 주요 과업내용

○ 일반현황조사

○ 기초자료 수집 및 조사

○ 성능향상 방안에 관한 사항

- 폐기물의 적정처리 방안 수립 등

○ 처리시스템의 구성 및 주요 설비 개선계획

- 기계 설비 계통 및 환경오염 방지 설비 검토

- 폐열 이용방안 수립 및 소각잔재물(부산물) 처리방안 검토

○ 토목, 건축 및 시설물 계획

○ 사업추진방식 검토 및 연차별 공사 시행계획

○ 사업비 산정 및 재원조달 계획

□ 소요예산

○ ‘14년 예산액 : 20천만 원

○ 예산과목

- 기후환경본부 자원순환과, 효율적인 폐기물처리, 안정적인 폐기물 처리, 자원회수시설 성능개선(마포), 시설비(100-401-01)

4		향 후 일 정

○ ‘14.8.    기본계획 용역 시행

○ ‘14.10.   입찰방법 심의 의뢰

○ ‘14.11.   기본설계 및 입찰안내서 용역 발주전 심의 및 발주

○ ‘15.04.   입찰안내서 심의 의뢰

○ ‘15.05.   공사발주.

○ ‘16.1 ~ ’17.12  시설개선공사 시행.

붙임 : 과업지시서 및 용역비 산출내역서 각 1부.  끝.