문서번호	조경과-2923
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경관리팀장	조경과장
변동풍		代김원식	03/05 이원영
협조

- 가로변 녹지량 확충사업 -

사업 대상지 변경 요청 건 검토보고

푸른도시국

(조경과)

- 가로변 녹지량 확충사업 -

사업 대상지 변경요청 건 검토보고

종로구청으로 부터 ‘2015년 가로변 녹지량 확충사업’ 대상지 변경 요청이 있어 검토하고 보고합니다.

□ 사업개요

○ 위치/규모 : 숭인동 1435 일대(난계로)/ 600㎡

○ 사업기간 : 2015. 1.~2015. 6.

○ 사 업 비 : 금144백만원

○ 사업내용 : 가로변 녹지 조성

□ 변경 요청사항

구 분	위 치	관리	사업내용	변경사유
당 초	난계로	시관리	가로변 녹지 조성	2014년 구비로 완료
변 경	사직로	시관리	가로변 녹지 정비	◦ 주민 건의사항 등
	율곡로	시관리	교통섬 녹지 조성
	삼청로	시관리	중앙분리대 정비

□ 변경 대상지 검토결과

○ 사직로 : 시도로의 가로변 녹지 정비로 대상지와 사업내용에 적합

○ 율곡로 : 시도로의 교통섬 녹지 조성으로 대상지와 사업내용에 적합

○ 삼청로 : 시도로의 중앙분리대 녹지 정비로 대상지와 사업내용에 적합

□ 보고자 의견

○ 2015년 가로변 녹지량 확충사업의 대상지를 변경 요청한 것으로 사업의 필요 및 시급성을 감안할 경우 변경사유가 타당하고

○ 가로변 녹지량 확충사업의 변경 대상지와 사업내용이 적합하므로 변경 승인하고자 함.

붙임 : 사업대상지 변경 요청서 1부.  끝.