문서번호	자연생태과-4299
결재일자	2015.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
소향순		양경규	03/10 최현실
협조

하천생태복원 및 녹화사업

설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 3.

하천생태복원 및 녹화사업

설계심의 결과보고

2015년 하천생태복원 및 녹화사업(영등포구, 안양천 생태복원 사업)설계심의를 실시하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		추 진 근 거

○ 자연생태과-1707(‘15.1.27)호, 하천생태복원 및 녹화사업 추진계획

○ 영등포구 공원녹지과-3600(‘15. 3. 9), 설계심의 요청

Ⅱ		심 의 개 요

○ 안 건 명 : ‘15년 하천생태복원 및 녹화사업 설계심의

○ 일    시 : 2015.03.10.(화) 14:00 ~ 14:30

○ 장    소 : 자연생태과 회의실

○ 심의요청부서 : 영등포구 공원녹지과

○ 심의참석 :  6명

- 서울시 : 자연생태과장, 자연자원팀장, 생태복원팀장,  담당

- 자치구 : 직원2, 용역업체1

Ⅲ		사 업 개 요

○ 위    치 : 영등포구 안양천(성산대교 남단~양화교) 680m

○ 사업내용 : 식재기반 정리, 수목(교목, 관목, 장미 등) 및 초화류 식재 등

○ 기   간 : 2015. 1 ~ 6

○ 사  업  비 : 295백만원

Ⅳ		심 의 결 과

○ 도입 수종은 안양천 전반의 꽃피는 시기등을 안배하고, 사면 환경여건(일조량 등)을 감안하여 결정

○ 대상지의 주변 경관과 생태적 측면을 고려하여 수목을 선정 식재하고,

특히 진달래 식재시에는 사전 생육에 대한 충분한 검토 실시

○ 초화류는 일률적인 식생매트 도입보다는 매트와 포트를 현장여건에 따라 다양하게 도입하여 식재

○ 식재적기, 여름철 우기 등을 고려한 공정관리 필요(하절기 식재 지양, 폭우시 공사 중지 등)

○ 공사 시행에 따른 민원 불편사항이 없도록 공사장 관리에 철저를 기하고, 시민 안내 등에 만전을 기하기 바람

○ 품명당 2천만원(공사의 경우 품명당 5천만원) 초과 제품 등에 대해 자체 특정제품 선정위원회를 구성하여 제품 선정의 적정성 등에 대해 심사를 득한 후 결과 제출

Ⅴ		행 정 사 항

○ 위 심의결과를 반영하여 공사를 시행하도록 해당 자치구에 통보 및 예산재배정

붙임  설계심의자료 1부.  끝.