내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	무장애 친화공원 조성 사전조사 및 기본계획용역 계약기간 연장의뢰

1. 공원녹지정책과-3972호(2015. 3. 12.)와 관련입니다.

2. 무장애 친화공원 조성 사전조사 및 기본계획 용역추진과 관련 아래와 같이 계약기간을 연장의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

- 용 역 명 : 무장애 친화공원 조성 사전조사 및 기본계획용역

- 용역기간 : 2014. 8. 27.~2015. 3. 14.(200일)

- 용역금액 : 금256,140,000원(금이억오천육백일십사만원)

- 용 역 사 : ㈜유신, ㈜기경건축사사무소

나. 변경내용 : 용역기간 연장

- 변경용역기간 : 2014. 8. 27.~2015. 4. 3.(20일 연장)

- 변경사유 : 최종용역보고결과 가이드라인 및 연차별 사업비 세부 검토보완 등                            시일 소요로 용역연장시행

- 귀책소재 : 서울시

- 지체상금 부과여부 : 부과하지 않음

붙    임 : 1. 용역 연장시행계획 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부. 끝.

	공원녹지정책과장
주무관	고희경		공원관리팀장	김현경		공원녹지정책과장	03/12 최윤종
협조자
시행	공원녹지정책과-3974	(		)	접수		(		)
우	100-772	서울 중구 무교로 21. 9층 더익스체인지서울빌딩	/
전화	02-2133-2031	/전송	02-2133-1080	/	kh731@seoul.go.kr	/	대시민공개