문서번호	설비부-3024
결재일자	2015.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시책사업과장	설비부장
유영선	임현근	03/12 박기형

『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』

관급자재(디젤발전기) 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  3.

도시기반시설본부

설 비 부

『돈화문 국악예술당 건립 전기공사』

관급자재(디젤발전기) 납품기한 연기 검토 보고

「돈화문 국악예술당 건립 전기공사」와 관련하여 선행공종 지연에 따른 관급자재(디젤발전기) 납품기한 연기를 아래와 같이 검토 보고 드림

1. 공사개요

□ 공사규모: 지하3층/지상1층, 연면적 1,800㎡

- 수전용량 350kw, 전력간선설비 및 조명등 설비, 전력제어설비, 무대조명설비

□ 도급금액: 444,312천 원(1차: 100,000천 원, 2차: 100,000천 원)

□ 시 공 사: 삼언전공㈜ 대표 공석복

□ 감 리 사: ㈜영화키스톤건축사사무소 대표 김인구

2. 관련근거

□ 돈화문감 제15-25호(2015.03.12.): 관급자재(발전기) 납품기한 연기요청

3. 관급자재 현황

품명 (규격)	납품요구번호	계 약 자	계약금액(원)	납품기한
디젤발전기 (3상4선,380/220V,175kW)	121425466400	보국전기공업㈜ 대표 곽기영	27,290,000	‘15. 3. 29

4. 납품기한 연기보고

□ 연기사유: 선행공종인 토목공사가 문화재 발굴조사, 민원발생 등으로 지연되어 건축공사 준공기한이 연장됨에 따른 관급자재 설치시기 미도래

□ 납품기한 연기: 당초 - ‘15. 3. 29,  변경 - ‘15. 11. 25

□ 귀책소재: 도시기반시설본부

□ 지체상금 부과여부: 미부과

□ 감리의견: 선행공종의 지연으로 건축공사 준공기한이 연장됨에 따라 관급자재(디젤발전기) 설치 시기가 미 도래하여 납품기한 연기 필요.

5. 보고자 의견

□ 감리원의 검토의견이 타당하다고 판단되어 선행공종인 건축공사 공정 등을 감안하여 관급자재 납품기한을 연기하고자 합니다.

따로붙임 : 관급자재(발전기) 납품기한 연기요청 공문 1부.  끝.