문서번호	설비부-3055
결재일자	2015.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 03/13 박기형
협조

『관악산 저류조 설치 전기공사』

관급자재(LED 실내조명등) 납품기한 연기보고

2015.  3.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『관악산 저류조 설치 전기공사』

관급자재(LED 실내조명등) 납품기한 연기보고

『관악산 저류조 설치 전기공사』의 관급자재인 LED 실내조명등의 설치시기가 토목공사 지연으로 미도래됨에 따른 납품기한 연기 검토 보고임.

관련근거

○ 납품기한 연기에 대한 감리검토의견서[도림천(감) 제2015-40호(2015.03.13.)]

계약현황

[건 명 : 관악산 저류조 설치공사 LED 조명등 구매]

품 명	납품기한	계약금액(원)	계약업체	비고
LED 실내조명등	2015.04.12	1,458,000	㈜솔라이트	3자단가

보고내용

○ 납품기한 연기

품 명	납 품 기 한		비 고
	당 초	변 경
LED 실내조명등	2015.04.12	2015.05.30	계약금액 변경없음

○ 연기사유 : 토목공사 추진일정에 따른 설치시기 미도래

○ 지체상금 부과 여부 : 미부과

조치의견

○ 상기 관급자재 납품기한 연기 의뢰(건설총괄부).

붙임  감리검토의견서 및 납품기한연기 합의서 각1부.  끝.