투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	「2014년 운현궁 문화재 보수공사」계약변경(정산) 시행 및 의뢰

우리본부에서 시행 중인 「2014년 운현궁 문화재 보수공사」와 관련하여 아래와 같이 계약변경(정산) 시행 및 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 운현궁 문화재 보수공사

나. 계 약 자 : ㈜창의건설 대표 박정권

다. 계약변경 요청내용

구 분	당 초	변 경	증·감
계약금액	155,333,000 원	153,145,000 원	감 2,188,000원
공사기간	`14.10.06.~`15.3.17	-	변경없음

라. 예산과목 : 문화관광디자인본부 역사문화재과, 문화유산의 계승발전,                                   전통문화시설 운영, 운현궁 위탁운영, 시설비

붙 임  1. 설계변경 및 준공정산 검토보고서 1부.
2. 변경(정산)내역서 1부.
3. 원가계산시스템_계약금액검증확인서 1부.
4. 합의각서 1부.  끝.

	건축부장
주무관	김현지		문화시설과장	안연수		건축부장	03/16 김우성
협조자	경리과장	허금도
시행	건축부-2974	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개