위례터널 인수인계를 위한 업무추진 담당자 지정

담당부서	검토일 분야별	3월													4월						5월						담당자	비고
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	30
도로보수과	상부 포장관계, 평면도 및 횡단도, 토지조서, 도로대장, 도로교통안전부속물																										이민호
	자동염수살포장치																										윤철식
시설보수과	종합보고서(실시설계보고서), 유지관리지침서(각종 계측기 위치 및 기능상태), 매뉴얼, 준공도면																										나철흠
	구조 및 수리계산서, 공사시방서																										김종범
	시설물 관리대장, 품질관리계획서, 초기점검보고서																										조장호
	집수정 및 배수처리관계																										한상신
	인수인계 관련업무 총괄, 인수인계서 목록 작성, 토지, 등기부 등본 및 용지도면 확인, 종합상황실 상황판, 개통대비 터널내부 교통안전부속물 확인																										정병윤
	점검결과 지적사항 조치																										정병윤
	수정보완																										담당자
기전과	터널 위기대응 매뉴얼																										곽정헌
	3차 종합시운전																										보수반 등 8명
	용역시행 입찰공고 및 협약 체결																										김현기
	합동근무 및 민간위탁 운영																										김현기

┕ 4. 1 개통예정일