[첨부2]

2013년 4/4분기 및 종합 One-PMIS 운영평가 방법

□ 기관(부서) 및 계약자별 평가 내용

○ 기관(부서) 평가

평가항목	평가비중	평 가 개 요
활용 실적	60%	- '행정정보연계 문서실적'부서별 평가 - 실적평가시스템 등록건수 및 자료 시스템내 보관여부 검토
부진 사업	20%	- 90%미만 부진공정 조치 평가
부서관심도	20%	- 부서장 등 사용자 접속 실적 평가

○ 계약자 평가 : 알림이 공개자료 체크 (기시행 점검표 참조)

평가항목	평가비중	평 가 개 요
공사 개요	30%	- 공사개요 입력자료 오류 평가 (건설알림이 공개자료 체크 여부)
공정 보고	30%	- 건설알림이 공개 '공정진척보고' 누락건수 평가
웹 카메라	20%	- 웹카메라 설치현장에 대한 웹카메라 고장 건수 평가 - 웹카메라 미설치 현장 공정보고 합산
공정 개정	20%	- 공종(엑티비티)관리 충실도 평가

□ 평가항목 배점표 (부서10점, 계약자10점)

❍ 부서별 평가

구 분	항 목	배점	등 급				비 고
			탁월	우 수	보 통	미 흡
부서별 (10점)	사업별 평균 활용실적 (행정정보연계건수,자료저장)	6점	6.0	5.4	4.8	4.2
			(0~25%P)	(26~50%P)	(51~75%P)	(76~100%P)	최상위부서와 차이비율
	부진사업 비율 (공정율 90%미만)	2점	2.0	1.8	1.6	1.4
			(91~120건)	(61~90건)	(31~60건)	(0~30건)
	부서장 관심도 (시스템 접속횟수)	2점	2.0	1.8	1.6	1.4
			(30회이상)	(21~30회)	(11~20회)	(0~10회)

※ 부서별 평가는 사업 건수의 경중을 감안하여 건수비례 가중치 부여(1~4%)

사업건수	1~5건	6~10건	11~15건	16~20건 이상	20건 이상
가 중 점	0%	1%	2%	3%	4%

❍ 계약자 평가

구 분	항 목	배 점	등 급			비 고
			우 수	보 통	미 흡
계약자별 (10점)	공사 개요	3점	3.0	2.7	2.4
	공정 보고	3점	3.0	2.7	2.4
	웹 카메라	2점	2.0	1.8	1.6
	공정 개정	2점	2.0	1.8	1.6