2015 이클레이 세계도시기후환경총회 성공개최
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	『도로포장 굴착복구 품질향상을 위한 기술개발 용역』 준공기한 연기 의뢰

1. 우리 부서에서 시행중인 『도로포장 굴착복구 품질향상을 위한 기술개발 용역』에 대하여  아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 도로포장 굴착복구 품질향상을 위한 기술개발 용역

나. 계약업체 : ㈜동일기술공사 김수보, (사)한국도로학회 서영찬

다. 계약금액 : 금478,000,000원

라. 계 약 일 : 2014.06.18

마. 준공기한 : 2015.04.13

바. 준공기한 변경(연기) 의뢰 내역

구 분	용역기간		도급금액
	당 초	변 경	당 초	변 경
용역	2014.06.18~2015.04.13	2014.06.18~2015.06.30 (증) 78일	478,000천원	변경없음

붙임 1) 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2) 준공기한 연기 검토 보고서 1부. 끝.

	도로관리과장
주무관	이문석		도로포장안전팀장	최연우		도로관리과장	04/08 이택근
협조자	도로굴착관리팀장	조용상
시행	도로관리과-5655	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로110번지 서울시청 10층 도로관리과	/
전화	02-2133-8173	/전송	02-2133-0765	/	lms66@seoul.go.kr	/	대시민공개