	서대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사 설계변경에 따른 공사비증액 계약결과 보고

1. 관련근거

○ 지방계약법 시행령 제74조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)

○ 소방행정과-4453(2015. 4. 10.)호『현장대응단 사무실 재배치 및

식당등 환경개선공사 설계변경 실정보고』

2. 위와 관련 현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사 진행 중 현장여건 변동과 설계 미반영 및 사용부서의 요구사항 등에 대하여 지방계약법 제74조 근거에 의거 변경계약체결 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 계약건명 : 현장대응단 사무실 재배치 및 식당등 환경개선공사

나. 계약기간 : 2015. 3. 16. ~ 2015. 4. 17.(5일 연장)

다. 설계변경 계약금액 내역

구 분	변 경 내 용			비 고
	변 경 전	변 경 후	증 ․ 감
건축공사	110,167,250원	124,067,250원	13,900,000원	부가세 등 간접비포함 및 낙찰율 87.745%적용

붙임 1. 공사변경계약서 1부.

2. 공사변경계약체결통보서 1부.

3. 계약내역서 부.

4. 설계변경 도서 1부.

5. 계약이행보증서(추가분) 1부.

6. 채권매입필증(추가분) 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015.04.17.

담당자	이용		장비회계팀장	이문성		소방행정과장	이재호		소방서장	04/13 장현태
협조자
시행	소방행정과-4519	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희로 182(연희동76-12)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02)3144-2119	/전송	02)3141-3819	/	thisdragon01@seoul.go.kr	/	부분공개(7)