투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(제22차 벌점부과심의위원회 심의 결과 알림)

1.업무지시현장 :  선사로~고덕지구간 도로확장공사 (주)한국건설관리공사, 선사로~고덕지구간 도로확장공사 주식회사 대저건설

2.작 성 일 자 : 2015-04-16 00:04:00

3.지 시 내 용

가. 도기본 건설총괄부-7412(2015. 4.14.)호와 관련임.

나. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사”와 관련하여 2015. 3월 기동불시안전점검단 점검결과 오수중계펌프장 신축시 개구부 덮개 미고정, 안전대 미착용 근로자 철근조립작업 , 강관비계 작업발판 및 안전난간 미설치, 중량물 취급 작업계획서 미작성 등 지적사항에 따라, 우리 본부 제22차 벌점심의위원회 상정되어 심의결과 ‘첫 지적사항이고, 지적후 3일이내 조치하였기에 금회 엄중경고 하고 차후 동일사례 지적시 벌점부과’로 “경고”처분 되었음을 알려드리오니, 추후 동일사례로 지적되어 벌점을 받는 일이 없도록 안전담당자(감리원, 시공사) 및 근로자 교육 등을 시행하여 현장관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 결재는 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송 처리 됩니다.

주무관							이한규			광역도로과장					04/16 진재섭
협조자
시행			토목부-7780									(						)		접수											(						)
우	100-777					서울 중구 무교동 96(청계천로 8) 프리미어플레이스 빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2556						/전송			02-3708-2599					/													/	대시민공개