문서번호	도시계획과-2650
결재일자	2014.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도시재생추진반장	도시계획과장	도시관리정책관		도시계획국장
박상희	임창수	한제현	류훈		02/24 이제원
협 조
	주무관			정현중

생활권계획 수립 용역 준공기한 연기보고

2014. 2.

도 시 계 획 국

(도시재생추진반)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(	과업수행기관과 협의	)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

생활권계획 수립 용역 준공기한 연기보고

서울시 생활권계획 수립 용역의 각 권역별(동북권,서북권,동남권,서남권) 용역 입찰과정에 상당한 기간이 소요되어과업수행하기에 절대 공기가 부족하므로 1차계약 준공기한을 연기하고자 함

1		과업개요

□ 과 업 명 : 서울시 생활권계획 수립 용역(동북권)

○ 1차 용역기간 : 2013. 12. 2 ～ 2014. 2. 28 (3개월)

※ 총 용역기간 : 2013. 12. 2 ∼ 2016. 12. 31(37개월)

○ 1차 계약금액 : 금 오억원정(￦ 500,000,000원)

○ 수행기관 : (주)건화,(주)하우드엔지니어링 종합건축사사무소

○ 과업내용 : 동북권역의 권역/지역생활권계획 수립

□ 과 업 명 : 서울시 생활권계획 수립 용역(서북권)

○ 1차 용역기간 : 2013. 12. 24 ～ 2014. 2. 28 (3개월)

※ 총용역기간 : 2013. 12. 24 ～ 2016. 12. 31(36개월)

○ 1차 계약금액 : 금 이억원정(￦ 200,000,000원)

○ 수행기관 : (주)동림피엔디,(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소

○ 과업내용 : 서북권역의 권역/지역생활권계획 수립

□ 과 업 명 : 서울시 생활권계획 수립 용역(서남권)

○ 1차 용역기간 : 2013.11.29 ～ 2014. 2. 28 (3개월)

※ 총용역기간 : 2013.11.29. ∼ 2016.12.31(37개월)

○ 1차 계약금액 : 금 삼억원정(￦ 300,000,000원)

○ 수행기관 : (주)미래이엔디,주엔지니어링(주)(주)디에이그룹엔지니어링 종합건축사사무소

○ 과업내용 : 서남권역의 권역/지역생활권계획 수립

□ 과 업 명 : 서울시 생활권계획 수립 용역(동남권)

○ 1차 용역기간 : 2013.12.30 ～ 2014. 2. 28 (3개월)

※ 총 용역기간 : 2013.12.30 ∼ 2016.12.31(36개월)

○ 1차 계약금액 : 금 이억원정(￦ 200,000,000원)

○ 수행기관 : ㈜제일, 희림종합건축(주), (주)동일기술공사

○ 과업내용 : 동남권역의 권역/지역생활권계획 수립

2		추진경위

○ ’13. 9.  4 : 생활권계획 용역 세부 시행계획

○ ’13.11.29 : 생활권계획 서남권역 용역계약체결

○ ’13.12.02 : 생활권계획 동북권역 용역계약체결

○ ’13.12.24 : 생활권계획 서북권역 용역계약체결

○ ’13.12.30 : 생활권계획 동남권역 용역계약체결

○ ’14. 1.15 : 4개권역 용역 착수보고

3		준공기한 연기

□ 1차계약 준공기한 변경 : 2014. 2. 28(당초) ⇒ 2014. 7. 31(변경)

□ 귀책사유 : 서울특별시

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 연기사유

○ 각 권역당 용역 입찰이 2회 공고되는 등 계약체결까지가 상당기간 소요되어 과업 수행하기에 절대공기가 부족하므로 4개권역(동북권,서북권,동남권,서남권)의 용역 준공기한을 모두 연기하고자 함

4		조치계획

□ 4개 권역별 용역수행기관과 준공기한 연기에 대한 변경계약 체결하고자 함.

붙  임 : 준공기한연기의뢰서 각 1부. 끝.