문서번호	시설관리과-4445
결재일자	2014.2.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장	소장
강무진		이시우	02/28 정운진
협조
	주무관		정윤상

계약심사 결과보고

(2014년중랑,동대문구관내 시설물및소화전설치및보수공사)

계약심사 결과보고

(2014년중랑,동대문구관내 시설물및소화전설치및보수공사

우리사업소에서 시행예정 시설물 정비공사(장기계속공사)에 대한 공사시행과 관련 본청(계약심사과) 심사결과에 대한 물량재확인(조정)후 공사 발주 시행코자 합니다

□ 관련근거 : 계약심사과-3378(2014.2.27.)호

□ 계약심사 현황

○ 공사현황

- 공사명: 2014년 중랑,동대문구관내 시설물 및 소화전 설치 및 보수공사

- 공사개요 : 밸브설치및보수(258개소),소화전설치및보수(102개소)등

- 공사기간 : 착공일~2015.4.30

○ 심사결과                                                         (단위;천원)

예산과목	심사요청액 (A)	심사금액 (B)	조정금액 (C)=A-B	조정율 (%)	비고
상수도공기업 특별회계	777,654	774,960	2,694	0.3

※원가심사에 따른 설계도서 재작성 및 물량 재확인후 사업발주

□ 물량재확인(조정) 내용                                      (단위;천원)

구 분	고재처리비(고철, kg)		금액	발주금액	비고
	수량	단가
당 초	23,500	-380	-8,930	774,960
변 경	35,500	-380	-13,490	769,934	조정금액
증 감	12,050	-	-4,560	-5,026

□ 처리의견

○ 공사원가 변경없이 물량조정 사항으로서 본청(계약심사과) 미통보 사항임.

○ 조정금액계이 계약심사 금액 이하로서 본청(재무과) 계약의뢰 가능

○ 상기와 같은 사항으로 변경(조정된) 금액으로 공사발주 시행 및 계약의뢰(재무과)코자

합니다

붙임 : 1. 계약심사과 심사내용 1부.

2. 물량조정 내역서(당초,변경) 각 1부.  끝.