□ 양식 제7호 서식 - (세출·기금·중기 공통) 사업설명서 □ - 워드작성

강남소방서 본서 및 영동119안전센터 환경개선공사

강남소방서 본서 식당 주방 바닥 파손부분과 천장 오염 부분 보수, 영동119안전센터 1,2층 화장실 및 샤워장 전면 보수, 대기실 바닥재 및 냉방시설 교체로 쾌적한 근무환경 조성 및   소방청사 시설물  유지관리에 만전을 기여하고자 함.

예산(안) 총괄

(단위 : 천원)

2013결산	2014예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)
				(B-A)*100/A
굴림 10pt		69,300

사 업 설 명

□  사업목적

○  강남소방서 직원 근무환경 저해요인을 해소함으로서 쾌적한 근무환경 조성

○  노후된 청사보수로 효율적인 관리

□  사업근거

○

○

□  사업내용

○  지원대상 : 서울특별시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3) 강남소방서

서울특별시 강남구 도산대로 320(논현동 92-1) 영동119안전센터

○  규    모 : 강남소방서 5/1층 4,859.57㎡ , 영동119안전센터 3/1층 721.5㎡

○  사업기간 : 2015.02 - 2015. 06(5개월간)

○  사업내용 : 강남소방서 본서 식당 주방 바닥 파손과 식당 천장 오염 부분 보수, 영동119안전센터 1,2층화장실 및 샤워장 전면 보수, 대기실 바닥재 및 냉·난방시설 교체

○  ’15년도 소요예산(안) : 69,300천원(설계비 3,300천원,시설비 : 56,000천원, 자산및물품취득비 10,000천원)

□  추진경위

-

□  2015년도 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분			2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계					69,300
		시설비			설계비 3,300
		시설비			시설비 56,000
		자산및물품취득비			10,000
	(예산과목)
		소방관서 보수보강
		(세부사업명)
	(예산과목)
		(세부사업명)

□  2014년도 예산(안) 산출 근거

￭ 시설공사 업체 견적

- 총 69,300천원(설계비 3,300천원, 시설비 : 56,000천원, 자산및물품취득비 10,000천원)

□  사업추진 절차

○  집행절차

- 기본계획수립 → 입찰공고 → 공사시행 → 준공

○  계약체결

- 입찰공고 → 공사계약

□  사업효과

○  사업영향, 산출물, 성과지표 등

성과 지표명	구분	2012	2013	2014	2015	2015년 목표치 산출근거	측정방법 (측정산식)	자료수집 방법 (자료출처)
	목표
	실적
	달성도

○  성과지표 이외의 연도별 사업추진 실적

2012년도	‧ ‧
2013년도	‧ ‧
2014년도	‧ ‧

○  향후 기대효과

- 강남소방서 직원 근무환경 저해요인을 해소함으로서 쾌적한 근무환경 조성

- 청사 노후로 인한 잦은 보수로 인한 예산낭비 요인 제거

□  사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○ 또는 ×	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자

<사전절차 이행결과>

○

-

-

○

□  최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

￭ 해당없음

□  2015년도 추진방향 및 추진일정

○  추진방향

- 강남소방서 직원 근무환경 저해요인을 해소함으로서 쾌적한 근무환경 조성

- 청사 노후로 인한 잦은 보수로 인한 예산낭비 요인 제거

○  추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
		69,300
	2015. 1		기본계획 방침
	2015. 2 ~ 3.	3,300	설계 및 입찰공고
	2015. 3		계약
	2015. 3 ~ 6.	56,000	준공검사 및 사업종료
	2015. 3~6	10,000	물품구매

집 행 결 과

□  최근 3년간 이․전용, 이용․불용 실적

(단위 : 천원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이․전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명시․사고)	불용
2012
2013
2014

□  결산시 지적사항 및 조치결과

○

○

중기재정 소요전망

□  사업운영 기본방향

○ 강남소방서 직원 근무환경 저해요인을 해소함으로서 쾌적한 근무환경 조성

○  청사 노후로 인한 잦은 보수로 인한 예산낭비 요인 제거

□  중기재정소요 및 산출근거

(단위 : 천원)

연도	소요예산	산출근거
2014		‣
2015	69,300	‣ 설계비 3,300천원, 시설비 : 56,000천원, 자산및물품취득비 10,000천원
2016		‣
2017		‣
2018		‣

실·본부·국	부서명	담당자
소방재난본부	강남소방서	장비회계팀장

참 고 자 료

강남소방서 식당 주방	영동119안전센터 화장실