투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신자	운영기획과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(잠실실내체육관 환기설비 개선공사)

1. 운영기획과-3236, 계약체결 보고(잠실실내체육관 환기설비 개선공사)와 관련관련입니다.

2. 잠실실내체육관 환기설비 개선공사 중, 공사연기 사유가 발생하여 그에 따른 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 연기내용

공 사 명	계약자	계약금액(원)	연기사유	준공기한
				변경전	변경후
잠실실내체육관 환기설비 개선공사	대진공무(주) 박종옥	101,084,620	실내체육관 내 『2015 서울 세계 시각장애인 경기대회』 개최에 따른 공사중단	2015.5.16.	2015.5.26.

붙임 : 보고서 1부.  끝.

	시설개선과장
주무관	지양수		시설개선과장	05/13 신동호
협조자
시행	시설개선과-4066	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 송파구 잠실동 10번지	/
전화	02-2240-8817	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개