투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(UPS) 납품기한 연기 요청(서남권 돔야구장 보행자 전용도로 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 『서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사』와 관련하여 관급자재(무정전전원장치) 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연기요청 내용

품 명	계약자	납품요구번호	계약금액 (원)	납품기한		비고
				당초	변경
무정전전원장치	국제통신공업(주)	121521974600	11,838,000	‘15.05.25	‘15.06.30

나. 연기사유 : 선행 공종 지연으로 관급자재 설치시기 미도래

다. 지체상금 : 미부과

붙임  납품기한 연기 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	배수웅		건축설비과장	김영수		설비부장	05/20 박기형
협조자
시행	설비부-5973	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 31) 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/	swoong@seoul.go.kr	/	대시민공개