문서번호	역사문화재과-11230
결재일자	2015.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	문화재보존팀장	역사문화재과장
김동천	이종혁	05/22 代장청락

「`14년 보신각과 남산한옥마을 소방시설 설치」

사업변경 및 준공정산에 따른 계약변경 검토

2015.05.

문화체육관광본부

(역사문화재과)

「`14년 보신각과 남산한옥마을 소방시설 설치」

사업변경 및 준공정산에 따른 계약변경 검토

남산 한옥마을 CCTV설치사업과 연계예정이었던 불꽃감지기 교체사업이 문화정책과(남산 한옥마을 관리)의 요청으로 2016년으로 연기됨에 따라 물량변경과 준공정산에 따른 계약 변경내역을 검토보고 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2014년 보신각과 남산한옥마을 소방시설 설치사업

○ 계약업체 : ㈜제우일렉스(대표: 김승환)

○ 계약금액 : 금61,811천원

○ 계약일자 : 2014.12.19

○ 사업기간 : 2014.12.24. ~ 05.22.

□ 추진경위

○ 2014.12.19. 사업계약 체결

○ 2015.04.22. 남산 한옥마을 CCTV설치관련 의견조회

- `15년 설치 불가(각종 공연 및 체험프로그램의 사전예약 운영으로 `16년 사업추진 요청)

○ 2015.05.08. 남산 한옥마을의 관리자 및 용역업체들과 현장협의

- 사업대상의 변경에 따른 용역내용을 변경에 합의함(기존 설치된 불량 불꽃감지기만을 교체하고 잔여 사업내용 및 금액은 감액 조치함.)

- 변경내역 : 불꽃감지기 신규설치 6개 → 4개 교체(인건비 없음)

○ 2015.05.21. 불꽃감지기의 변경계약 및 합의각서 작성

□ 사업 변동사유

○ 남산 한옥마을 CCTV설치사업과 연계하여 공동배관을 사용하고, 한번의 터파기로 관광객의 불편을 최소화하고자 남산 한옥마을의 관리부서인 문화정책과의 의견조회 결과 다음과 같이 회신됨.

- 연초에 계획한 각종 공연 및 체험 프로그램의 사전예약 운영으로 `16년 사업대상으로 요청함(문화정책과-5526, 2015.04.24.)

□ 공사의 주요 변동현황

○ 불꽃감지기 설치사업 변동내역

- 보신각(변동없음), 남산한옥마을(당초:6개 신규설치 → 4개 교체)

○ 공사금액 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 감	비고
도급액	공 급 가 액	56,191,819	29,408,000	-26,783,819	감
	부가가치세	5,619,181	2,940,800	-2,678,381	감
	계	61,811,000	32,348,800	-29,462,200	감

○ 주요자재 변동현황

- 주요자재

주요자재	당초수량	변경수량	증감	단 가	증감금액	비고
화재수신반 10회로	2	1	-1	437,778	-437,778	감
불꽃감지기	8	6	-2	2,744,999	-5,489,998	감
불꽃감지기전원반	2	1	-1	266,968	-266,968	감
내열비닐절연전선	10,811	1,478	-9,333	434	-4,050,522	감
썬쉴드	-	6	6	162,143	972,858	증

- 인건비 : 남산 한옥마을의 불량 불꽃감지기 교체에 따른 남산 한옥마을의 설치 인건비 전부 감액

인건비	당초	변경	증감	비고
	18,095,430	6,819,610	-11,275,820	감

- 건강, 연금, 노인 장기요양보험료 미납으로 감액 (879,601원)

□ 검토의견

○ 보신각 및 남산 한옥마을 불꽃감지기의 설치 및 교체가 적정하므로 공사내용 변경 후 준공처리하고자 함.

□ 향후계획

○ 05.21. : 용역사업 변경계약 의뢰(재무과)

○ 05.22. : 보신각과 남산 한옥마을 소방시설 설치사업 준공

붙임 1. 변경내역서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.