문서번호	시설과-1202
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	02/17 이용태
협조	★공원운영과장		代안창원
	주무관		남상국

낙산공원 재조성사업 추진계획

2015. 2.

중부공원녹지사업소

시설과

낙산공원 재조성사업 추진계획

조성후 15년이 경과한 낙산공원의 노후시설 정비를 통해 인접한 장수마을, 이화벽화마을 등과 연계 소통을 강화하고, 핵심 자원인한양도성과 낙산의 역사성을 되살리는 공원 재조성을 추진하고자 함.

□ 공원현황

○ 위    치 : 종로구 동숭동 산2-10 등 일대

○ 도시계획 : 근린공원

○ 면    적 : 198,376㎡ (종로구, 성북구)

○ 주요시설 : 낙산전시관, 한양도성 낙산구간(2.1km), 야외무대,

전망광장, 산책로, 수경(분수)시설, 배드민턴장 등

○ 조성경위

- ‘40.03.12. : 최초 공원결정(총독부고시)

- ‘89.11.20. : 공원조성계획 최초

- ‘97.03.     : 낙산복원계획 수립(시민아파트지역 공원편입 등)

- ‘97.06.~’02.06. : 낙산(종로지역)복원사업

- ‘07.03.~’10.12. : 낙산(성북지역)복원사업

□ 사업개요

○ 추진배경

- 공원운영과-16298(2013.8.20.)호 원각사부지 활용방안 검토의뢰 계획

- 공원운영과-20878(2014.11.6.)호 낙산공원 정비대상지 보고

○ 추진방향

- 낙산 및 한양도성의 역사성을 되살리는 역사·문화공원으로 정비

- 대학로, 장수마을, 이화벽화마을 등 주변 지역과의 소통·연계 강화

- 노후시설 개선을 통한 시민이 안전하고 편안한 공원으로 정비

○ 대    상 : 낙산공원 전체

○ 사업기간(안) : ‘15.2 ~ ’17.12 (3년) ※ 용역후 기간조정 가능

○ 사업내용(안) : 2015년 기본계획 수립후, 추후 연차별 재조성 시행

- 조경분야 : 수목생육환경 개선 및 재배치, 노후시설물 정비, 원각사부지 건물철거 및 공원조성, 한양도성 주변 지장물 이설 및 정비,주변지역 연계동선 및 안내체계 개선 등

- 건축분야 : 낙산전시관, 공원관리소, 화장실, 안내초소 등 리모델링

- 전기통신 : 공원등, CCTV, 성곽조명 등 추가 및 정비

- 기타사항 : 폐기물 처리 등

○ 총사업비(안) : 2,950백만원(설계 150, 공사 2,800)

구분	계	2015년	2016년	2017년
사업비(백만원)	2,950	150	1,400	1,400

※ 기본계획 수립후 소요예산 및 기간산정 결과에 따라 조정가능

□ 2015년 사업계획

○ 사업기간 : 2015. 2. ~ 11.

○ 사업내용 : 낙산공원 재조성 기본계획 및 기본설계

- 현황조사(측량 등) 및 법적사항 검토

- 낙산공원 재조성 기본계획 수립 및 기본설계

- 공원조성계획 및 안내체계 내용 정비

- 도시공원위원회, 문화재 등 각종 위원회 심의

○ 사 업 비 : 150백만원(용역비)

○ 예산과목 : 중부공원녹지사업소, 남산의입체적개발을통한서울의대표공원화, 남산및산하공원운영, 남산및산하공원시설물보수정비, 시설비

○ 입찰방법 : 제한경쟁입찰(서울지역)

○ 입찰참가자격 : 조경 및 건축분야 관련 자격업체

○ 추진일정(안)

- ‘15.02.~03. : 추진계획 수립, 기술용역타당성심사, 설계발주심의

- ‘15.03.~04. : 설계발주, 용역착수

- ‘15.05.~09. : 기본계획 및 기본설계(주민의견수렴 등), 설계심의

- ‘15.07.       : 2016년 예산 요청

- ‘15.07.~09. : 도시공원위원회, 문화재현상변경, 건설기술심의 등

- ‘15.10.~11. : 기본설계안 보완

- ‘15.11.       : 용역준공

- ‘16. ~  ’17. : 실시설계 및 공사시행

□ 행정사항

○ 각종 위원회 심의 요청 및 결과반영

○ 2016년 이후 사업비 예산반영

첨부 1. 위치도 및 현황사진 1부.

2. 개략공사비(안) 1부.  끝.