투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기통신 공사기간 연기 요청

1. 설비부-6661(2015. 06. 05.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진하고 있는『율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 공사』에 따른 전기 및 통신공사의 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 변경내용

○ 준공기한 연기 요청 현황

구 분		율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 전기공사	율곡로(창경궁앞) 도로구조개선 통신공사
총차	당초	‘14.5.15. ~ ‘15.6.30.	‘14.5.15. ~ ‘15.6.30.
	변경	‘14.5.15. ~ ‘17.12.31.	‘14.5.15. ~ ‘17.12.31.
	증감	증 914일	증 914일
1차	당초	‘14.5.15. ~ ‘15.6.30.	‘14.5.15. ~ ‘15.12.31.
	변경	‘14.5.15. ~ ‘15.6.30.	‘14.5.15. ~ ‘15.12.31.
	증감	증 184일	증 184일
계약업체		아람이앤테크(주)	송림기술(주)
비 고		계약금액 변경없음

나. 연기사유 : 선행공정인 토목공사 지연으로 설비공사 시기 미도래

다. 지체상금 부과 여부 : 미부과

붙 임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 및 책임감리 검토보고서 각 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	신정규		녹색성장과장	김창균		설비부장	전결 06/05 박기형
협조자	★경리과장	代김용범		계약1팀장	김점선
시행	설비부-6717	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96) 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8640	/전송	02-3708-8659	/		/	대시민공개