투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	9호선 2단계 915공구 잔여공사 처리방안 통보

1. 지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사와 관련입니다.

2. 2015. 3. 28.일 지하철 개통 이후 귀사에 잔여공사 마무리를 수차례 요청한 바 있으나, 귀사가 법정관리 절차 진행중임을 사유로 잔여공사 마무리를 사실상 중지하고 있기에

3. 운행중인 정거장임을 감안 승객과 시설물의 안전 및 수해방지 대비 등을 위해 부득이 잔여공사 중 차수판, 셧터정비, 용역원실 등 운영에 필요한 일부 시설을 인접공구에 시공토록 조치한바, 이에 대한 소요 비용은 귀 공구 공사 내역에서 정산 감액 처리 예정임을 알려드립니다.

4. 아울러 비축자재 확보, 자전거보관대 등 기타 잔여공사 등에 대해서도 미 이행할 경우 준공처리 전까지 설계변경 감액 등 조치할 예정임을 알려드립니다.  끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					9호선 2단계 915공구 책임감리원,9호선 2단계 915공구 현장대리인
주무관							정현배			건축공사과장					김내환					도시철도건축부장					06/09 이병석
협조자
시행			도시철도건축부-3990									(						)		접수											(						)
우	100-170					서울 중구 청계천로 8 도시철도건축부															/			infra.seoul.go.lkr
전화		02)772-7341						/전송			02)772-7309					/													/	대시민공개