문서번호	토목부-11800
결재일자	2015.6.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		진재섭	06/09 노우성
협조

아천IC 지장물(상수도)이설 검토 보고

- 구리암사대교 건설공사 -

2015. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

아천IC 지장물(상수도) 이설 검토 보고

아천IC 램프 구조물 설치구간 지장물(상수도)이설에 따른 검토 보고임.

※ 암사감리 2015 – 309호(2015. 6. 8.) : 아천IC 지장물(상수도)이설 실정보고

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 구리암사대교 건설공사

○ 규    모 : 교량건설 폭 4∼6차로, 연장 1.13㎞

○ 계 약 액 : 192,599백만원(15차 18,517백만원)

○ 공사기간 : ’06. 4. 5. ∼’15. 6.30.(15차 ’14.12.11.∼’15. 6.30.)

○ 시공사 및 감리단 : 현대건설㈜, ㈜도화엔지니어링외 1개사

□ 감리단 보고내용

○ 추진경위

- 2014. 9.19. : 지장물 이설 협의(도기본 → 구리시)

- 2014. 9.23. : 지장물 이설 협의 회신(구리시→도기본)

‣ 강변북로 횡단구간 유지관리를 위해 예비관로 포함 2열 부설, 세부적 이설계획 별도 협의

○ 지장물(상수도)이설 규모

구 분	위 치	규격	연장	비고
상수도 이설	강북삼거리∼한강시민공원	D=80㎜	380m
	한강시민공원(강변북로)분기점∼군경합동검문소	D=50㎜	240m

○ 공사비 검토

(단위 : 백만원)

공 종	공 사 비			비고
	당 초	변 경	증 · 감
토공	-	4,051	4,051
부설공	-	2,493	2,493
구조물공	-	1,658	1,658
부대공 및 자재비	-	30,663	30,663
직접공사비	-	38,865	38,865
제경비	-	3,862	3,862
공급가액	-	42,727	42,727
부가가치세	-	4,273	4,273
도급공사비	-	47,000	47,000

※ 적용단가 : 기 계약공종 → 계약단가, 신규단가 → 협의율(85.367%) 적용

○ 감리 검토의견

- 아천IC 램프(A,H,I,J구간)구조물 설치 구간 지하매설물(상수도)저촉에 따른 관로 이설이 불가피하고

- 아천IC내 설치예정인 군·경 합동검문소 상수도 인입에 따른 관로부설공사로 공사비 반영은 타당함.

□ 조치계획

○ 상기 책임감리원 검토내용에 따라 ‘아천IC 지장물(상수도) 이설’ 실정보고 건에 대해 승인하고 추후 설계변경시 시공 결과에 따라 정산토록 조치코자 함.

- 아천IC 지장물(상수도) 이설 : 증) 47백만원

붙  임 : 감리단 실정보고 및 검토의견서 1 부.  끝.