문서번호	보행자전거과-7638
결재일자	2015.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보행안전팀장	보행자전거과장		보행친화기획관
박준영	이경우	이방일		06/10 김현식
협 조

’15년 보행자우선도로 디자인 및 기본조사 시행계획

2015. 6.

도시교통본부

(보행자전거과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

’15년 보행자우선도로 디자인 및 기본조사 시행계획

’15년 보행자우선도로 사업지에 대하여 보행전문기관에 디자인 및 기본조사를 의뢰하여 사업의 전문성 및 실효성을 높이고자 함

□ 추진배경

○ 보행자우선도로 사업의 확대(’14년 8개소 → ’15년 13개소)로 생활권 이면도로에서 보행자가 우선되는 사회적 인식을 공유

- ’14년(8개소)  : 구로구 경인로15길 등

- ’15년(13개소) : 용산구 녹사평대로46길 등

○ 사업의 전문성 제고 및 효율성 증가를 위해 보행전문기관과의 협업을 추진하여 사업효과 극대화 및 시민 신뢰도 강화 필요

□ 용역개요

○ 용 역 명 : ’15년 보행자우선도로 디자인 및 기본조사

○ 용역기간 : 계약일로부터 ~ 4개월

○ 용역대상 : ’15년 보행자우선도로 사업 대상지 13개소

○ 용역가액 : 20,000천원(부가가치세 포함)

○ 계약방법 : 수의 계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호

- 사유 : 추정예산이 소액(2천만원)이고 실질적인 결과도출을 위해 보행자우선도로 사업의 연구경험과 업무협약이 체결된 기관과 계약하고자함

○ 용역수행 업체 : 건축도시공간연구소 (소장 : 제해성)

- 국무조정실 산하 국토연구원 부설연구기관(안양시 소재)

	< 그간의 추진실적 >
‣ ’13년 아마존, 보행자우선도로 보행도시 포럼 발표(’14.7.8) ‣ ’14년 보행자우선도로 설계 및 추진방향 검토 시 전문가로 참여 ‣ ’15년 서울시와 보행친화도시 조성 공동추진을 위한 업무협약 수립(’15.5.22)

□ 주요 과업내용

○ ’15년 보행자우선도로 시설물의 디자인 개선방안 제시

- 보·차도간 일체형 바닥 패턴안에 대한 디자인 및 설계방안 도출

- 사업대상지별 지역 여건에 따른 운영 및 시설물 개선방안 제시

○ 사업시행에 따른 모니터링 및 개선방향 제시

- 사업시행 전후를 비교한 모니터링을 실시하여 비교 및 추이 분석

- 향후사업의 설계원칙, 추진기준을 작성하여 사업 백서에 반영

□ 소요예산 : 20,000천원

○ 예산과목 : 자전거 이용활성화 및 교통환경 개선, 보행환경 개선사업, 보행자 우선도로 조성, 시설비(401-01)

□ 향후 일정

○ ’14. 6~7   : 계약체결 및 자치구 협의

○ ’14. 7~9   : 기본조사 및 디자인 개선안  도출

○ ’15. 9~11  : 개선안 반영 및 모니터링 실시

붙임 : 현황조사 과업내용서 1부.  끝.