문서번호	공원조성과-8020
결재일자	2015.6.22.
공개여부	비공개
방침번호

				시 민
주무관	공원개발팀장	공원조성과장		푸른도시국장
협 조	주무관
	주무관

경의선숲길  공원조성

실시계획변경에 따른 고시계획 보고

2015.  6

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

경의선숲길 공원조성

실시계획 변경에 따른 고시계획 보고

◇ 제2014-980호(2014.5.29.)로 열람공고한후 관계부서 협의결과를 반영하여

제2014-271호(2014.7.17.)로 실시계획변경 고시하고 제2015-1068호(2015.6.4.)로

경의선숲길 공원조성사업에 대하여 사업기간 및 물건의 변경에 따른 실시계획 변경을

열람공고후 의견수렴을 거쳐 다음과 같이 실시계획 변경 고시하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역구간(6.3㎞)

○ 규    모 : 102,008㎡

○ 사업기간 : 인가일 ~ 2016.3.31

○ 총사업비 : 457억원

- 마포구 신수동사업비 2,742백만원 별도

□ 사업추진현황

○ 2011.12.29.: 도시계획시설(공원) 결정(제2011-401호)

○ 2012.09.06.: 도시계획시설(공원) 명칭결정(제2012-236호)

○ 2013.10.10.: 도시계획시설(공원)변경결정 및 지형도면 고시(제2013-330호)

- 신수동 85,26,48,49호(340㎡) 추가결정

○ 2013.12.12.: 공원조성계획결정 및 지형도면 고시(제2013-420호)

○ 2013.12.16.: 도시계획시설(공원) 실시계획에 따른 열람공고(제2013-1975호)

○ 2013.12.23.: 관계기관 및 부서 협의

~ 2014.01.09  - 한국철도시설공단 의견제시(2014.01.10.)

○ 2014.01.11.: 열람공고에 따른 제시의견 조치

~ 2014.02.26

○ 2014.03.06.: 도시계획시설(경의선숲길공원)사업 실시계획 고시(제2014-78호)

○ 2014.04.09.: 마포구청(공원녹지과,건설관리과)에 보상계획 통보

○ 2014.05.09.: 마포구청에서 보상통보에 따른 의견제시

○ 2014.05.29.: 도시계획시설(공원) 시실계획변경에 따른 열람공고(제2014-980호)

○ 2014.07.17.: 도시계획시설(경의선숲길공원)사업 실시계획변경고시(제2014-271호)

○ 2015.06.04.: 도시계획시설(공원) 시실계획변경에 따른 열람공고(제2015-1068호)

○ 2015.06.04.: 공고에 따른 이해관계자 의견수렴

~ 2014.06.18.  - 이의신청 및 의견제출 없음

□ 실시계획변경 주요내용

❍ 사업의 종류 및 명칭

- 종  류 : 도시계획시설(공원) 사업

- 명  칭 : 경의선숲길 공원조성사업(2단계 2차구간)

❍ 사업시행지 : 경의선지상구간(용산문화체육센터~가좌역)

❍ 사업의 규모 및 내용

가. 면 적 : 102,008㎡내 신수동 85-50외 7개소 물건 8건(297.9㎡) 추가보상

나. 내 용 : 사업시행을 위한 사업기간 및 물건의 변경에 추가보상 및 공원조성

❍ 사업시행자 : 서울특별시장

❍ 사업의 착수 및 준공예정일 : 인가일~ 2016.5.31.(당초준공예정일2016.3.31.)

❍ 수용 또는 사용할 물건조서 : 따로붙임(변경사항 물건 8건)

- 규격 및 수량 등 변경은 물건조서 따로붙임 참조(보상물량 8건 297.9㎡)

□ 실보상관련 물건조서 결정 조사

❍ 조사부서 : 마포구청(공원녹지과)

□ 행정사항

❍ 마포구에 실시계획 변경고시 내용을 보상에 반영토록 요청

따로붙임 : 1. 도시계획시설(공원) 실시계획변경 고시문(안) 1부.

2. 물건조서 및 관련증빙서류 사본 1부. (별도붙임). 끝.