투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2015년 본부청사 부서 재배치 (칸막이) 공사

1. 총무과-10941호(2015.07.02.) 관련입니다.

2. 「2015년 본부청사 부서 재배치 (칸막이) 공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	2015년 본부청사 부서 재배치 (칸막이) 공사
	계약상대자	(주)세현디엔씨 (대표 : 유은식)
	계 약 일 자	2015.06.24
변 경 내 역	내 용	준공기한 연장, 계약금액 변경 없음
	변경사유	부서 재배치 위치 변경에 따른 작업지연 및 추가작업
기 간 변 경	변경전 착공일자	2015.06.24	변경후 착공일자	2015.06.24
	변경전 준공기한	2015.07.03	변경후 준공기한	2015.07.10
금 액 변 경	변 경 전	19,404,000 원
	변경금액	-
	변 경 후	19,404,000 원

붙     임 : 1. 계약보증금지급각서 1부

2. 계약의뢰서 1부. 끝.

주무관	심옥경		총무과장	최대봉		총무부장	07/07 이상국
협조자
시행	총무과-11207	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/	imok@seoul.go.kr	/	부분공개