문서번호	시설관리과-12827
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	07/13 남정열
협 조

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사)

2015. 7.

강동수도사업소

(시설관리과)

공사 실정보고에 대한 검토 보고

(고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행 중인 「고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사」와 관련하여, 감독기관인 시설관리공단으로부터 실정 보고서가 접수되어 검토한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 7. 11.

보 고 자 : 시설7급  양봉우

공사현황

가. 공 사 명 : 고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 관부설 D150~300㎜, L=1,510m

다. 공사기간 : 2015년 4월 23일 ~ 2015년 9월 25일

라. 도 급 액 : 328,120,000원

마. 계약상대자 : 세경엔지니어링(주) 정용호

바. 감 독 자 : 서울특별시시설관리공단

실정보고(시설관리공단 보고내용)

가. 현황 및 문제점

구 분	위치	당초 설계	현 안 사 항
보행자 매트	2, 4구간(L=680m)	방진덮개	부직포 사용금지 요청됨
PE free 휀스	2, 4구간(L=680m)	1열 설치	보행자의 안전유도 위해 공사구간중 2열 필요
보행안전도우미	2, 4구간(L=680m)	30m 이상 2인	보행안전도우미외 교통정리원 임무 필요함

※ 도로굴착복구 미복구부분 안전시설 설치 및 관리이행철저 요청(도로과-5638호, 2015.03.23)

- 상수관 부설후 보도블록 복구 공사전까지 방진덮개(부직포)를 덮어 유지토록 당초        설계되었으나 도로관리청(강동구청 도로과)은 시민불편 초래하는 부직포를 사용하지        않도록 금지 요청됨

- 공사구간과 보도 경계에 1열 PE free 휀스로는 보행자의 안전통행 유도가 미흡함

- 공사구간 앞, 뒤로 보행안전도우미 1인씩 2인배치토록 계획되었으나 자재운반, 상수관        부설 등을 위해 차로부 교통정리원이 필요한 실정임

나. 검토의견

- 보도블록 복구전 임시보행로 방진덮개인 부직포 사용이 금지되었으므로 인조매트         사용토록함

- 공사구간과 보도 경계 위치에 2열의 라바콘 + 걸이대를 이용하여 보행자 안전통행을        유지토록함

- 보행자 통행이 빈번하지 않으므로 보행안전도우미 교육이수자 1인 및 교통정리원 1인        배치하여 보도구간 공사운영토록함

- 공사개요

구 분	당초 설계	변경 내용	개략공사비
보행자 매트	방진덮개	인조매트(쿠션롤매트, 폭1.2m, 두께 10㎜)	증) 3,700천원
PE 휀스	PE free 휀스 1열	라바콘 + 걸이대, 2열로 보행자 통로 유지	감) 300천원
보행안전도우미	보행안전도우미 2인	보행안전도우미 1인 + 교통정리원 1인	변동없음

※ 현장여건의 변동에 따른 상세수량은 추후 실측 정산 반영코자함

조치의견

가. 도로관리청에서 보도블록구간 공사 복구전 시민불편을 초래하는 부직포 사용 금지        요청에 따라 인조매트를 사용하여 시민 통행에 불편이 없도록 조치코자 하며

나. 보도블록 공사구간을 보행자가 안전하게 통행할 수 있도록 안전휀스를 2열로 설치코자 함

다. 보행자 통행이 빈번하지 않는 구간에 대하여 공사가 원활히 진행될수 있도록 보행        안전도우미 1인 및 교통정리원 1인을 배치하여 운영코자 함

라. 상기 사항에 대하여 공사 감독기관인 시설관리공단에 통보하여 반영하도록 하고,         변경사항에 따른 정산 물량은 추후 설계변경 시 반영코자 함.

붙 임 : 공사 실정보고 관련서류 1부.  끝.