보 고 서
			담당	팀장
문서번호	공사감독2처-7731
보존기간	준영구		협 조
결재일자	2015.06.12.
공개여부	공개
제 목	보도구간(2, 4구간) 공사계획 실정 보고

1		공사현황

가. 공 사 명 : 고덕동 668~646번지간외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사기간 : 2015년 4월 23일 ~ 2015년 9월 25일

다. 도 급 액 : 328,120,000원

라. 공사개요 : 관부설 D150~300㎜, L=1,510m

마. 도 급 자 : 세경엔지니어링(주) 정용호

바. 발 주 청 : 강동수도사업소(시설관리과)

2		보고내용

보도(2, 4구간)구간의 부대공종 상세 시공계획 검토보고임.

※ 도로굴착복구 미복구부분 안전시설 설치 및 관리이행철저 요청(도로과-5638호,

2015.03.23)과 관련입니다.

가. 현황 및 문제점

구 분	위치	당초 설계	현 안 사 항
보행자 매트	2, 4구간(L=680m)	방진덮개	부직포 사용금지 요청됨
PE free 휀스	2, 4구간(L=680m)	1열 설치	보행자의 안전유도 위해 공사구간중 2열 필요
보행안전도우미	2, 4구간(L=680m)	30m 이상 2인	보행안전도우미외 교통정리원 임무 필요함

- 상수관 부설후 보도블록 복구 공사전까지 방진덮개(부직포)를 덮어 유지토록 당초

설계되었으나 도로관리청(강동구청 도로과)은 시민불편 초래하는 부직포를 사용하지

않도록 금지 요청됨

- 공사구간과 보도 경계에 1열 PE free 휀스로는 보행자의 안전통행 유도가 미흡함

- 공사구간 앞, 뒤로 보행안전도우미 1인씩 2인배치토록 계획되었으나 자재운반,

상수관 부설 등을 위해 차로부 교통정리원이 필요한 실정임

나. 검토의견

- 보도블록 복구전 임시보행로 방진덮개인 부직포 사용이 금지되었으므로 인조매트

사용토록함

- 공사구간과 보도 경계 위치에 2열의 라바콘 + 걸이대를 이용하여 보행자 안전통행

을 유지토록함

- 보행자 통행이 빈번하지 않으므로 보행안전도우미 교육이수자 1인 및 교통정리원 1인

배치하여 보도구간 공사운영토록함

- 공사개요

구 분	당초 설계	변경 내용	개략공사비
보행자 매트	방진덮개	인조매트(쿠션롤매트, 폭1.2m, 두께 10㎜)	증) 3,700천원
PE 휀스	PE free 휀스 1열	라바콘 + 걸이대, 2열로 보행자 통로 유지	감) 300천원
보행안전도우미	보행안전도우미 2인	보행안전도우미 1인 + 교통정리원 1인	변동없음

(※ 현장여건의 변동에 따른 상세수량은 추후 실측 정산 반영코자함)

3		조치의견

- 상기 검토내용을 발주청에 보고하고 그 결과에 따라 설계변경시 정산반영코자함

붙임 : 관련문서 각1부.  끝.