연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공사추진사항	공정(%)
계	도시기반 시설본부	53개 공사장				토목부25, 건축부6,설비부1,방재시설부7,도시철도토목부10,도시철도사업부4
소계	시 설 국	39개 공사장
	토 목 부	25개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2016-05-19	* 구조물 1. 본선 시점부 전철연구간 폐기물 반출 2. 본선 시점부 STA.0+620~660 Sheet Pile 항타 3. 본선 시점부 STA.0+660~720 가시설(띠장) 설치 4. 본선 시점부 STA.0+760~830 방음벽 벽체 철근 조립 5. 본선 시점부 STA.0+960~1+096 방음벽 벽체 거푸집 조립 6. 본선 시점부 STA.1+200~240 방음벽 기초 철근 조립 7. 본선 시점부 STA.1+260~400 방음벽 기초 터파기 8. 본선교 MBR2 상부 슬래브 철근 조립(수서) 9. 본선교 MBR3 상부 슬래브 방호벽 전선관 설치 10. 본선교 MBR3 상부 슬래브 거푸집 조립(수서) 11. 본선교 P11 코핑 거푸집 운반 및 조립 12. 남북간연결도로 중앙 연석 및 보도부 거푸집 조립 13. DRA BR1, DRB BR1~2 낙하물방지망 설치 14. DRB BR1 교각표면처리(중성화방지)(검측:9시) 15. 기아천교 A1 뒷채움 작업 * 강교(현장) 1. 본선교 MBR3 강교BOX 도장 작업 2. DRB BR1 소부재 볼트 체결 작업	53
2	강남순환도시고속도로(5공구)	L=5.1km, B=6~8차로	4,029	2007-11-20	2016-05-19	토목공사 - 성산방향 동상방지층 면정리 작업 - 금천영업소 포장철근 가공 조립 - 성산, 수서 비상주차대 구간 공동구 벽체 거푸집 해체 - 종점부 환기소 배기타워 내부 합판 해체 건축공사 - 종점부 집중배기소 지하 1층 벽체, 천정바탕처리 - 금천영업소 외벽 판넬 설치 기계공사 - 관악터널 비상주차대 구간 물분무 횡배관 제작 및 설치 - 성산 TRCM구간 소화전 및 물분무함 설치 - 시점부 집중배기소 크레인 설치 준비작업 전기공사 - 수서 주행공동구 CCTV 케이블 포설 - 성산 상부 전등케이블 설치	65
3	강남순환도시고속도로(6-1공구)	L=1.13km, B=3~4차로	1,442	2009-05-20	2016-05-19	◆ 토공 - RAMP-C 사면 성토 작업 ◆ 터널공 ◎ 시점부 - RAMP-D 공동구 거푸집 설치 ◎ 종점부 - 수서 배면 그라우팅 - 수서, 성산 차량갱 공동구 철근 및 거푸집설치 - 신봉 차량갱 접속부 철근 및 거푸집설치 ◆ 구조물공 ◎ 시점부 - RAMP-D 2~3block 벽체 철근 조립 - RAMP-D 1block 외부비계 해체 - 통합집수정 B1 액체 방수 - TRcM 수서 공동구 콘크리트 타설 ◎ 종점부 - 성산 1span 시스템동바리 설치 - 성산 2span 상부 슬래브 콘크리트 타설 - 성산 4span 상부 슬래브 철근 조립	73
4	강남순환도시고속도로(6-2공구)	L=2.4km, B=8차로	1,151	2009-04-01	2016-05-19	시점부 (터널공) - 작업없음 (포장공) - 작업없음 (지하차도공) - 성산 기초철근 조립 - 수서 기초철근 조립, 벽체 철근 조립 및 비계 설치, 방수보호멱 거푸집 설치 (부대공) - 작업없음 종점부 (터널공) - 갱부작업 (포장공) - 작업없음 (구조물공)- 작업없음 (부대공) - ramp-f 우수관로터파기, 제2변전소 터파기	85
5	강남순환도시고속도로(7-1공구)	L=1.04km, B=6차로	685	2010-06-01	2016-05-19	터널공 1. 서초터널 본선부 공동구 벽체5단 거푸집해체 2. 서초터널 옥외공동구 터파기 3. 서초터널(성산) 라이닝폼 이동설치 구조물공 1. 사당IC교 P1(성산) 코핑1단 양생 2. 사당IC교 P1(수서) 코핑1단 Con&#039;c타설(65㎥) 배수공 1. Ramp-A 지하차도 0+404 횡배수관 기초 거푸집조립 2. Ramp-A 지하차도 시,종점부 보강토옹벽시공 부대공 1. 본선(성산) 0+330~410 방음벽기초 철근조립 2. 본선(성산) 0+410~490 방음벽벽체 거푸집해체	83
6	강남순환도시고속도로(7-2공구)	L=2.7km, B=6차로	1,861	2008-04-01	2016-05-19	1. 서초터널 - 선택층 골재포설 및 다짐 2. 선암교 - 성산 T-2 철근가공조립 - 성산 T-4 슬래브동바리 및 거푸집설치 - 성산 T-7 슬래브거푸집 해체 3. 토공외 공사 1) 전기: 배관,케이블트레이설치 및 포설 2) 건축: 저류조 벽체 거푸집 조립 영업소 철골설치	85
7	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로 (교량 2개소, 지하차도 3개소)	2,215	2002-07-03	2018-07-30	- 주암교 수서방향 2경간 슬래브 거푸집 설치[목공:7,보통:2,카고:1] - 주암교 수서방향 면정리작업[보통:2] - 본선고가교 P3 코핑폼 제작 조립[기능공:3,,보통:2] - 민자접속부 교통처리 안전시설물 SF-2 난간대 도색[반장:1,보통:3] - STA.1+180 중앙파일천공/항타 작업 [천공기:1,천공공:1,신호수:2,B/H0.6W:1] - 화물터미널 앞 지하차도 작업구 가복공 제작[가시설공:1,반장:1] - 화물터미널 앞 지하차도 신호등 이설[기능공:2,B/H0.3w:1,카고:1] - 구룡지하차도 기존도로부 아스콘 깨기 작업[B/H 0.6w:1] - 구룡지하차도 기계실 외부 타일마감공사[기능공(타일공):2]	27
8	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량 : L=395m, 15~20m, 도로 : L=750m, 20→30m,	294	2008-10-23	2015-12-31	■ 본선구간 - 시점제방로(경사구간) 연석거푸집설치 ■ 램프구간 - 자재정리 및 현장정리	82
9	남부순환로-오정대로간 도로개설공사	강서구 발산동~부천시계 (남부순환로~부천시 오정대로 삼거리) - 도로개설 : B=40m L=1.23㎞ (폭 40m, 교량1개소)	98	2010-09-29	2015-12-30	1.토공 ○보도부 토공정리 (STA.NO0+100~0+400) 2.배수공 ○V형 측구 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 (STA.NO 0+400~0+440좌) 3.구조물공 ○가족길교 교량받침 양생 (STA.NO 0+940~0+960) ○P/F빔 가로보 철근 배근 (STA.NO 0+940~0+960)	67
10	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km (지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2015-12-31	◎ 도봉6단계 하천구간(Sta.3+855~4+105) - 현장정리 및 수방대비 ◎ 건축관리동 - 띠장 및 어스앙카 해체 ◎ 안전관리 활동 - 안전시설물 설치 및 유지관리	59
11	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km (지하차도 2개소, 고가차도, 보도육교)	558	2008-02-15	2015-12-31	- 장암지하차도 쉬트파일 연결부 보강용접 및 방수철판 가공	56
12	방화대교 남단 접속도로 건설공사	L=1.046km, B=40m	660	2005-10-05	2015-10-31	Ramp-A1 방호벽 거푸집 조립 및 콘크리트 타설 Ramp-A LMC 준비작업(슬라브 평삭) Ramp-B 법면보호블럭 표면정리 Ramp-C 토공부 배수로 청소 현장주변 정리 및 청소	92
13	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	- 고가철거 및 신설 L=753m (고가설치, 옹벽설치, 기존고가 보수보강)	171	2011-01-06	2015-12-31	1.교각P6~ 교대A1 리브데크 설치 2.교대A2~ 교각P9 슬래브 콘크리트 타설 3.교각P6~ 교각P9 교좌장치 교체작업	77
14	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2015-12-31	1. STA.1+340 우수받이 설치 및 코아천공 2. 가재골 진입로 우수관로 터파기 및 흄관 부설 3. 우수맨홀, 우수받이 거푸집 조립 및 콘크리트 타설 4. 고덕산장 진입로 L형측구 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 5. 오수펌프장 주변 횡배수관 터파기 및 흄관 부설 1) 토공 - 흙깍기(설계:471,415M3) 실적 / 누계 : 0 / 362,415 - 사토반출(설계:412,130M3) 실적 / 누계 : 0 / 350,429 - 무진동 암파쇄(설계:23,212M2) 실적 / 누계 : 0 / 20,944 2)비탈면 안정공 - 암절개면 보호식재공(설계:13,270M3) 실적 / 누계 : 0/ 11,900 3) 배수공 - 흄관부설(설계:5,520M) 실적 / 누계 : 10 / 2,039 - 산마루측구(설계:1,830M) 실적 / 누계 : 0 / 855 4) 부대공 - 암파쇄 방호시설(설계:1,400) 실적/누계 : 0 / 1,297 - 서울시 상수도 터파기 및 되메우기(설계:7,599) 실적/누계 : 0 / 3,569 - 서울시 상수도 관부설(설계:640M) 실적/누계 : 0 / 452 - 오수펌프장 이설(설계:1식) 실적/누계 : 0 / 0.84 - 생태육교(설계:1식) 실적/누계 : 0 / 0.05	67
15	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	L=867m, B=4차로(터널 2개소)	240	2012-12-27	2015-12-26	● 터널공사 1. 개착터널(서울방향) 1)시점 - 개착라이닝 철근가공 및 조립 2)종점 - 면벽 거푸집설치 및 콘크리트 타설 2. 개착터널(고양방향) 1)종점 - 면벽부 날개벽 콘크리트 타설 ● 배수 및 옹벽공사 1. 종점부(서울측) - 보강토 옹벽 블럭쌓기(뒷채움토사 치환 및 블록이동) ● 현장 정리정돈	74
16	용비교~행당중간 도로개설공사	도로개설 L=718m, B=5~6차로	263	2007-03-22	2015-12-31	○구조물공 - A1 접속슬래브 기초 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 - 기존도로 포장 절삭 ○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	86
17	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2015-08-22	■ 육상구간(북단IC) -R-C A-1 BOX 1.BLOCK1 벽체 거푸집 조립 -북단접속교 P4(강북) : 교각 1LOT 철근 조립 -북단접속교 P4(강남) : 교각 코핑 거푸집 설치 -분류하수관보호공 1. A구간 : 기초 철근 조립 준비 2. B,E구간 : 기초 철근 조립 준비 3. C구간 : 버림 지반 정리	24
18	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2017-12-31	1. 종점부 kt관로 깨기 작업 2. 종점부 폐기물 반출 작업 3. 현장정리	48
19	응봉교 확장 및 성능개선 공사	중로아치교 225m, 접속교량 407m (기존교량 철거)	456	2008-10-20	2015-12-31	○구조물공 - 3, 4span 본선 포장 - 2span 강교 소부재 설치 - 2span 리브데크 설치 준비 ○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	89
20	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2015-12-31	- STA.0+180~260(좌) 보도 및 자전거도로 노상 토공 작업 - STA.0+200(우) 상수도 C-Line D1000 배관 및 접합 - STA.0+220~780(중앙부) 토공 깎기 / 암천공 및 발파 - STA.0+260~760(좌) 구조물 내부 타일 붙임 / 화강판석 설치 - STA.0+740~800(좌) 보도 및 식수대 경계석 설치 / 기초 콘크리트 타설	56
21	성암로 병목구간 개선공사	도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 450m	23	2014-02-23	2015-12-31	-현황측량 -종점부 현장정리	78
22	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-09-27	1.교통처리 4~9단계 1단가시설 설치 2.교통처리 11단계 지장물 매달기 3.교통처리 10,11단계 복공가시설 설치 4.양수작업 및 침사조 정비 5.교통처리 4~10단계 토공 집토 및 토사반출 6.TYPE-9 3단 띠장 해체 7.TYPE-9 안전비계 설치 8.Qin-TAKO 천공	25
23	도시고속도로연결램프(정릉길) 설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	o P2 기둥3단 강재 거푸집 해체 o P3 기둥 1단 철근조립 o P3 기둥 1단 거푸집 설치	7
24	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	□ 연직갱부지 조성공사 - 연직갱 가이드월 구간 숏크리트 타설 및 버럭처리 - 연직갱 임시계단 제작 - 연직갱 발파 천공 - 절토부 사면보호공(자연표토복원공)	21
25	서대문고가철거공사	고가철거1개소(폭11.5 연장374) 등	38	2014-12-08	2015-07-07
	건 축 부	6개 공사장				2
26	IT COMPLEX 건립공사	지하7층, 지상21층(연면적 81,956㎡)	1,834	2009-04-03	2015-10-06	1.건축 대민동 --저층부 롤스크린 브라켓 설치 -4층 항온항습기실 도어유리설치 -2~6층 홀 벽체 천정 퍼티, 도장, 보양 작업 -2, 3, 12, 14, 16층 방음도어 하드웨어 설치 --15층 홀바닥석재 설치, 석재 양중,천정 및 커텐박스 설치 전문동 -5, 6층 새김 및 퍼티 -5, 7, 13, 14층 항온항습기실 도어유리설치 -6층 무빙월 마감작업 -15~17층 화장실 점검구 설치 및 등타공 -방충말 설치 -저층부 롤스크린 브라켓 설치 지하층 -지하1층,홀바닥석재 설치 -지하2층 복도벽체,바닥 도장 -지하7층 천정틀 설치 2.설비 -지하1층 배관 보온공사 -지하1층,대민동1, 3, 9층, 전문동3, 10~13, 18층 배관공사 -지하1층 덕트공사, E/V기계실 에어컨 설치작업, 기계실 지열배관공사, 지하2층 에어컨 설치 -대민동 3층, 전문동 17~19층 SP설치 및 소화배관 공사 3.전기 -대민동 1~17층 CATV TAP BOX 설치, 전문동 21층 TPS실 IDF렉 통신패치판넬 설치 -지하7층, 대민동 12층, 전문동 15층 노출배관공사 -지하7층 케이블 포설, 지하7층, 대민동 6~12층 케이블 단말 처리	89
27	돈화문 국악예술당 신축공사	지하3층 / 지상1층, 연면적 1,800㎡	54	2013-12-17	2015-11-30	1. 현장정리정돈 2. 안전시설물 설치 및 정리 3. 지하3층 옹벽 거푸집 해체 및 정리 4. 지하2층 옹벽 철근 가공	60
28	서울과학관건립공사	지하1층, 지상3층(연면적 12,330㎡)	99	2014-01-13	2016-01-12	1. 철근콘크리트공사 - 식당 및 사무실구간, 전시홀#2 동바리 수평보강재 설치 - 상설전시실#2 외부 경사로 거푸집 설치 - 교육실구간 및 외부계단 슬라브 및 벽체 이음 철근 배근 2. 시스템 - 상설전시실#2 시스템동바리 설치 - 로비홀구간 시스템동바리 해체 및 정리 3. 직영 - 램프구간 안전난간대 설치 - 오픈주차장 주위 법면 천막보양 - 현장 내 안전로프 설치 및 정비	20
29	양천주민편익시설 리모델링 및 증축공사	지하3층, 지상1층(연면적 5841㎡)	126	2014-12-01	2016-06-30	현장정리 및 안전시설물 설치 지정공사 - PHC 파일 천공 및 근입 항타 작업	24
30	재사용플라자건립공사	지하2층,지상5층(연면적16,529㎡)	444	2015-01-15	2017-01-14	○ 도면검토 현장 및 현장주변 정리 안전시설물 정비 ○ 피스, 보걸이 제작 이음작업 및 이동 ○ 가시설 공사 1~8, E~G` (띠장설치 작업및 보걸이 설치) ○ 터파기 공사 (폐기물 집토)	11
31	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층,지상5층(연면적11,950㎡)	235	2013-01-02	2017-04-30	1 남쪽 2단 띠장 설치작업 2 암 반출 및 발파작업 3 토사(폐기물)정리작업 4 토류판 설치자업 5 현장정리작업	39
	설 비 부	1개 공사장
32	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2015-11-09	◆ 토목공사 -. 지하1층 SEC1 동측 거푸집 해체 -. 지하1층 SEC1 슬라브 합판거푸집 설치 -. 지하1층 SEC2 남/서측 거푸집 설치 -. 지하1층 SEC2 E.P.S 벽체 철근조립 -. 지하1층 SEC2 내벽 거푸집 해체 및 정리 -. 지하1층 SEC2 북측 비계해체작업 -. 지하2층 SEC1 D.A#4 비계설치작업 -. 지하2층 SEC2 공동구 거푸집 해체 및 정리 ◆ 전기공사 -. 지하2층 분배조전등, 감지기취부 / 공동구트레이 벽체 브라켓설치 -. 계단실 전등설비입선 ◆ 기계설비공사 -. 지하3층 펌프 설치 -. 지하2층 탈취배관 가대설치 ◆ 건축기계설비공사 -. 지하2층 슬리브설치, 위생배관 및 덕트배관 -. 지하2,3층 SP배관 제작 ◆ 탈취설비공사 -. 탈취덕트 지지대 및 배관설치작업 -. 전기설비작업 및 워크웨이설치작업 ◆ 건축공사 -. 지하2층 송풍기실 비계 해체	61
	방재시설부	7개 공사장
33	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사		954	2013-05-27	2016-05-25	- 저류배수터널 : STA.168+14.6~168+17.6 상부 장약,발파,버럭인양 및 상차,부석정리,B/K작업 : STA.168+14.6~168+17.6 상부 락볼트설치 및 숏크리트 타설 : STA.168+14.6~168+17.6 상부 지보설치 및 숏크리트 타설 (야간) : STA.168+13.1~168+14.6 상부 발파천공(야간) - 유지관리수직구 : 발파4단 장약,발파(반단면 2회),버럭인양 및 상차 - 환기수직구 : 11단 계단설치 및 락볼트 천공 - 고지수직구 : 4단 기계굴착 및 숏크리트 타설,버럭반출 - 저지수직구1 : 17단 철근 및 거푸집 조립 - 저지2횡갱 : STA.-10.2~-11.2 횡갱굴착,지보설치 및 숏크리트 타설	15
34	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2015-08-09	1) 토목 □ 시설현대화 - 소화조 2-1구간 1단벽체 철근조립 및 헌치 거푸집 해체작업 - 소화조 2-2구간 1단벽체 콘크리트 타설 - 분배수로 4-2구간 공동구 바닥슬래브 거푸집 설치작업 - 초기우수저류조 4-3구간 내부 동바리 및 거푸집 해체작업 - 반류수처리시설 4-3구간 1단벽체 철근조립 및 거푸집 설치작업 - 생물반응조 5-4구간 내부 외부 비계 해체작업 - 생물반응조 5-4구간 바닥슬래브 철근조립 및 거푸집 설치작업 - 이차침전지 6-2구간 공동구 바닥슬래브 콘크리트 타설 - 이차침전지 6-3구간 침전조 지하1층 슬래브 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - 이차침전지 6-4구간 공동구 지하2층 벽체 거푸집 설치작업 - 총인처리시설 8구간 터파기 및 토사 외부 반출작업 - 총인처리시설 8-1구간 PHC파일 천공 준비작업 □ 부대공 - 현장 주변 정리 및 청소/ 안전시설물 설치/ 양수기 관리작업 2) 기계 - 시설현대화 7차분 시공계획서 및 기자재 제작도서 검토 3) 전기 - 시설현대화 분배수로 4-2구간 공도구 전열 바닥매립 배관작업 4) 안전교육 [5RP] - 추락 : 작업발판 연결상태 확인 철저! / 충돌 : 신호수 배치 철저! 감전 : 충전부 절연조치 철저! 낙하 : 소자재 인양함 사용 철저! / 화재 : 불티방지대 설치 철저! 5) 금일 위험 작업 구역 - 초기우수저류조 4-3구간 내부 동바리 및 거푸집 해체작업	39
35	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	- 고도처리시설 개량 88만톤/일 - 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2016-02-28	[토목공사] - 초기우수 처리시설 상부 공동구.전기실 모체침투방수 - 초기우수 처리시설 유출수로 에폭시방수 - 초기우수 처리시설 유지관리도로 벽체 거푸집 및 동바리 해체 - 총인처리시설L 내부 벽체 거푸집/동바리 해체 및 정리 - 총인처리시설R 여과시설 벽체,기둥 철근/거푸집 조립, 동바리 및 발판 설치 - 총인처리시설R 여과시설 외부 비계 설치 - 총인처리시설R 방류수조 벽체 철근 조립 - 도달기지#1 되메우기 및 가시설 해체 - 추진기지#1 반력벽 해체 [기계공사] - 시설현대화 질산화조 R 유입배관 작업 - 시설현대화 질산화조 L 공기배관 작업 - 시설현대화 기계실 중층 급수배관 설치작업 - 초기우수처리시설 산기관설치 [전기공사] - 기계실 노출배관 - 생물여과 질산화조R 케이블트레이 설치	73
36	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2016-09-29	PC부재(기둥) 반입 및 설치 PC기둥 무수축몰탈 주입 상부현장 철근가공 및 거푸집조립 ① PC제작 기둥(제작 - / 누계 1351)설치(설치 20 / 누계 1213) 보 (제작 - / 누계 2437)설치(설치 - / 누계 1828) 슬라브 제작 (제작 500 / 누계 23326 ㎡ ) 설치 (설치 - / 누계 3971 EA)	61
37	공릉2빗물펌프장 신설및 면목4동배수관로	공릉2빗물펌프장 :펌프장 신설 520㎥/min,유입관리 BOX 273m - 면목4동 배수관로 :배수관로D1,500mm*2련, L=143m	52	2013-01-08	2016-07-07	◎공릉2빗물펌프장 빗물펌프장 터파기 및 가시설 설치(띠장 1단) 기존간이펌프실 코어천공	48
38	합정외 1 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2016-04-30	중동펌프장 토출관 설계 및 시공 일정 준비 수방관련 현장 확인 합정펌프장 -지장가옥 공사착공 지연 -설계도서 검토	50
39	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	서울대학교 정문 앞 광장 저류조 40,000㎥ 서울대학교 내 분산형 저류조 25,000㎥ 임시저류조(강남순환 6-1공구외1개소) 130,000㎥	339	2012-06-13	2017-05-31	서울대 정문 - 철근 가공 및 조립 작업 - 중앙파일 청소 작업	75
	도시철도국	14개 공사장
	도시철도토목부	10개 공사장
40	916공구	L=1,1km(정거장 2개소)	1,526	2008-06-02	2016-03-01	□ 코엑스몰 연결출입구 H빔 매몰부 할석 및 미장, 방수 가시설 접속부 기존파일철거 및 보조파일 설치 띠장, 버팀보 철거 및 인양, 자재정리 □ 기타 보도정비 및 점검 지적사항 조치(928) 상수도 보수 및 보강작업	99
41	918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	▶ 터널1구간 - 터널 인버트 철근조립 및 가공/운반 - 터널 인버트 콘크리트 타설 ▶ 개착1구간 - 9~10span 헌치 거푸집 설치 ▶ 931정거장 - 2,3span 상부슬래브 벽체 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 10span 지하1층 상부슬래브 멍에,장선,합판 거푸집 설치 - 12span 지하2층 중간슬래브 철근 조립 - 정화조 지하1층 벽체1단 거푸집 설치 - #3작업구 하부 가시설 자재 인양 ▶ 개착3구간 - 22span 이동통로 변경, 덕트 개구부 덮개 설치 - 23span 상부슬래브 철근 조립 - 24,25span 수직,수평 앵글 해체 - 25~27span 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 34span 시스템동바리 설치 ▶ 지중(동공)점검 - 공사구간 순찰, 육안점검	62
42	919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2015-12-29	- 집수정 펌프 가동 상태점검 ▣ 931S1 환기구 - 지하 2층 중간슬래브 철근조립 및 동바리 보강 - 지하 2층 벽체 거푸집 보강 ▣ 932정거장 - 시점(931S2E2) 4단 사버팀보, 2단 횡버팀보 설치 - 지하 1층 기둥 거푸집 해체(4Span) - 지하 1층 토사피트, 면벽 콘크리트 타설(5, 6Span) - 구조물 매몰부 면정리 및 면벽 거푸집 설치(7Span) - #2 연결통로 1, 2단 사버팀보 해체(8Span) - 중앙파일 절단(11Span) - #1, 2 출입구 토류판 설치 및 어스앵카 띠장, ㄷ-형강 설치 - #3, 4 출입구 2단 버팀보 보강재 설치, 계단설치 ▣ 933정거장 - 지하 3층 보호벽 거푸집 설치 및 콘크리트 타설(3Span) - 지하 1층 상부슬래브 양생(5Span) - 지하 1층 기둥 콘크리트 타설 및 154kV 깨기, 매달기(7Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 설치 및 상수도관 매달기(7Span) - 지하 1층 상부슬래브 철근조립 및 동바리, 거푸집 설치(9Span) - 지하 1층 중간파일 해체(9Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 해체(10Span) - #1, 2 출입구 어스앵커 띠장 설치 및 사버팀보 설치 - #5, 6 출입구 주형받침보 보강, 기존구조물 깨기, 도시가스 매달기 - #5, 6 출입구 어스앵커 천공 ▣ 쉴드터널 - 갱내 발판, 레일 및 레일슬리퍼 제거 - 커터헤드 육성보강 및 커터씰 반출	41
43	920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2015-12-29	[1환기구] -보호벽 거푸집 조립 -중앙파일 방수철판 용접 [쉴드 TBM 구간-BOX1] -1구간 인버트 철근 가공 및 조립 -1구간 수전설비 해체 및 이동 -2구간 쉴드TBM 조립 [BOX1~2환기구] -보호벽 거푸집 해체 및 정리(1-2span) -BOX1 기초 철근 이동 및 조립(3span) [934정거장~BOX2구간] -정거장 바닥 면정리 및 시트방수(1span) -정거장 1단 벽체 거푸집 조립(3span) -정거장 보조파일 제작(7-9span) -정거장 출입구 지장물 조사 및 복구(1,2번) -3환기구 내부벽체 거푸집 조립(1span) -BOX2 보호벽 거푸집 해체(1~3span)	55
44	921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2015-12-29	(935 정거장) ■ 본선 및 정거장 공사 - 동바리 해체 작업(1~2스판) - 상부슬라브 방수 면정리 작업(3스판) - 중앙파일 및 ㄷ-형강 해체작업(6스판) - 지역난방관 받침 기둥 철근 조립 작업(5스판) (936 정거장) ■ 본체구조물 - 지하2층 슬라브 철근 및 거푸집 설치(3스판) - 지하1층 가시설 버팀보 해체 작업(4스판) - 벽체 거푸집 설치 작업(자전거주차장) - 벽체거푸집 해체 작업(연결통로) ■ 환승통로 - NTR 강관압입 및 굴진 ■ NATM터널 - 상행선 (보도헌치 콘크리트 타설작업) - 하행선 (라이닝 폼 조립작업) (쉴드터널) ■ 쉴드발진부(본선) - 쉴드터널 굴진 및 세그먼트 조립 - 침목 및 레일 설치작업	52
45	922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	■ 936S2E2 - 지하2층 1단벽체 거푸집 해체 ■ 937정거장 - 1SPAN 중간슬라브 동바리 설치 - 3~4SPAN 측벽 5단 띠장해체(상선) - 3~4SPAN 지하1층 1단벽체 되메우기(하선) - 5SPAN 지하1층 1단벽체 거푸집 설치 - 6SPAN 지하1층 대합실 기초 거푸집 해체 - 9SPAN 중간슬라브 및 마감벽 동바리 보강 - 9SPAN 중간슬라브 철근조립 ■ 937S1E1 - 작업사항 없음 ■ 본선 집수정 - 작업사항 없음 ■ 본선 1터널 1.상선 - 인버트 철근가공 및 조립(17~20span) - 보도헌치 거푸집 설치(9~16span) 2.하선 - 라이닝폼 이동 ■ 본선 2터널 1.상선 - 영구갱문 철근조립 2.하선 - 현장정리 ■ 본선 3터널 1.상선 - 라이닝 콘크리트 타설(37span) 2. 하선 - 라이닝 콘크리트 타설(42span)	62
46	923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	□ 본선터널 1. 현장정비 □ 본선1구간(937S2) 1. 1span 중간슬라브 철근조립(40k 210~232) 2. 17~18span 상부되메우기(40k 498~516) 3. 21~22span 4단 버팀보 해체(40k 564~597) 4. 23~24span 측벽 채움콘크리트 타설(40k 597~633) 5. 26span 기둥 및 상부슬라브 내벽 거푸집 설치(40k 651~670) □ 938 정거장(937E2, 938E1) 1. 27span 5단 버팀보 해체(40k 670~696) 2. 28span 중간슬라브 철근조립(40k 696~714) 3. 31span 상부슬라브 동바리 설치(40k 752~769) / 4. 34~35span 지하2층 2단벽체 방수(40k 805~837) 5. 37~38span 지하1층 1단벽체 방수(40k 857~890) / 6. 39span 상부슬라브 철근조립(40k 890~907) 7. 39span 상부슬라브 동바리 보강 및 2단벽체 거푸집 설치(40k 890~907) / 8. 환기덕트#3 슬라브 철근조립 □ 본선2구간(938S1) 1. 종점부 연장구간 주형보 및 복공판 설치 2. 복구#5(41k 195~285) 차선도색 및 가드휀스 설치	60
47	우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	[1공구 차량기지~L03정거장종점] - 0km145.3~1k763.0 L=1km908.3 - * 전회콘크리트 타설 완료구간 가설재 해체 및 양생 * 현장콘크리트 타설준비(07/22.수) sco 분기기 및 인상선 선형정정,배수로 설치,콘크리트 타설전 검측 * 차회 현장콘크리트 타설준비(7/29.수) 건넘선 2조 침목배열 및 궤광조립 * L01정거장 #8 건넘 침목 및 레일 배열 [2공구 L03정거장종점~L07정거장종점] - 1km763.0~4km995.8 L=3km232.8 - * 콘크리트 타설구간 양생 및 가설재 이동 * 현장 콘크리트 타설 1k601~2k901 L=490m 상선 L03정거장~L03환기구(07/21.화) 현장 콘크리트 타설 07:00~ 남동 레미콘 수직관 위치 L03정거장 예정67대 * L04정거장~L04환기구 상선(07/28.화) 체결구 및 가설재 배열,조립,1차 LEVEL 정정 [3공구 구간 L07정거장종점~L10정거장종점] - 4km995.8~8km167.5 L=3km171.7 - * L05~L07정거장 장대레일 운반 [4공구 구간 L10정거장종점~과업종점] - 8km167.5~11km262.23 L=3km094.73 - * 현장 콘크리트 타설 완료 -작업 없음	57
48	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	111	2015-03-17	2019-03-28	-
49	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	-
	도시철도사업부	4개 공사장
50	우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	[토목] ○차량기지 - 기능실 환기구 외벽 거푸집 조립 - 상부 슬래브 되메우기 - #1환기구 및 폐수처리시설 내부 거푸집 및 철근조립 - 유치선 이동통로 거푸집 제작 - 차량 반입구 옆 복공판 해체 ○L01정거장[견인차보관소] - #1외부출입구 기초철근조립 - #4환기구 덕트 벽체 철근조립 - 3SP 측벽 되메우기 ○본선2구간[이마트앞] - 10~12SP 2단 벽체 되메우기 - 4~5SP 1단버팀보 해체 ○L02정거장[GS주유소앞] - 기능실 B동 2단벽체 외부거푸집 해체 및 정리 - 기능실 A동 보조파일 설치 ○L03정거장[연탄굴뚝앞] - 기능실 상,하부 슬래브 H파일 치핑 및 면정리 - 승강장 배면 기둥거푸집 제작 및 설치 - 승강장 하부 차수턱 철근조립 및 거푸집 설치 - 자재정리 및 반출, 청소 [전기] ○차량기지 - 지하 1, 2층 전력간선 케이블 포설 [기계] ○차량기지 - 승객용 E/V 설치 - 지하 1층 공조기계실 덕트 설치 - 지하 2층 덕트 설치 및 보온 ○L02정거장 - 본선연결송수구 배관자재 반입 [건축] ○차량기지 - 중정 수성페인트 작업	74
51	우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	○4정거장[파리바게트 앞] - 주형보 해체 - 계단 거푸집 설치 ○본선4구간[송암교회 앞] - 지장물 복구공 거푸집 해체 ○5정거장[화계사사거리 앞] &lt;건축&gt; - 지상층 내부 형틀자재 정리 및 청소 - 외부 선내리기 및 앙카시공 - 외부비계 수정작업 &lt;전기&gt; - 지상4층 통신기계실 전등 배관 작업 - 본선터널 트레이 작업 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 ○6정거장[삼성래미안아파트앞] - 지장물 복구공 기동 거푸집 설치 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 - 정거장 기능실 소화배관 마무리작업 ○7정거장[솔샘동물병원앞] - L07S1(급기) 보조파일 설치 - 지장물 복구공 철근 조립,L06S2(급기) Slab 거푸집 설치 - 외부 출입구#1 2단 벽체 철근 조립 &lt;건축&gt; - 지붕층 바닥 보형틀 및 동바리 설치 - 지붕층 데크설치 &lt;전기&gt; - 지상4층 전등배관 작업 - 지상4층 소방배관 작업 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 - 정거장 기능실 소화배관 작업	77
52	우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	○ L07E환기구(옥이슈퍼앞) 본선1터널 - 현장자재정리 L07E환기구 - 가시설 해체 및 자재 정리 ○ L08E환기구(풍림아파트앞) L08E환기구-5단벽체 철근 배근 ○ L09E환기구(미래전자앞) 본선5터널-현장자재정리, 본선6터널-현장자재정리 L09E환기구 - 지하2층 확폭부 채움 콘크리트 타설 ○ L08정거장(미양초등학교앞) 본선 및 정거장 환기구 벽체 철근 배근 출입구#2 토사 집토, 환기구 파일 천공 위치 줄파기 정화조 수조 내부 청소 ○ L09정거장(청수교회앞) 2,3스판 지하2층 차수턱 거푸집 해체 및 자재정리 출입구#1 벽체 동바리 및 슬라브 설치 , 정화조 차수턱 거푸집 설치 ○ L10정거장(아리랑고개앞) 3스판 지하1층 차수턱 거푸집 설치 출입구#2 채움 거푸집 설치, 외부출입구#2 급.배기 방수 ○건축공사 L08 정거장 블럭반입 및 쌓기,견출 및 면갈이 L09정거장 도막방수,	74
53	우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	○ L10E 환기구 - 수직구 1단벽체 거푸집보강 ○ L11E 환기구 - 기초철근조립 ○ L12E 환기구 - 터널전선 및 배전판 정비 - 터널 유도동판 도장 ○ L11 정거장 - 동바리 및 가시설해체 - 환승통로 토사굴착 ○ L12 정거장 - 정거장 정비 - 콘크리트 방수턱 거푸집설치(건축) ○ L13 정거장 - 지장물매달기 해체 - 복공판 및 주형보 반출	75

8월 기동불시(정기) 안전점검 대상공사장