문서번호	시설과-5394
결재일자	2015.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경팀장	시설과장
송창선		남상국	07/29 김한준
협조

조달물품 구매수량 변경 검토보고

(식생매트, 중랑캠핑숲 시설재정비공사)

2015. 7.

중부공원녹지사업소

(시설과)

조달물품 구매수량 변경 검토보고

(식생매트, 중랑캠핑숲 시설재정비공사)

중랑캠핑숲 **************급자재(조달구매)로 지급된 ‘야자매트’ 수량이 공사내역 보다 많아, 설치후 남은 수량에 대해 반품하고 조달구매 계약을 변경하고자 함

□ 조달물품 구매내역

○ 품    명 : 식생매트(야자매트)

○ 수    량 : 921.6m(규격 W1200×T20mm)

○ 납품기한 : ‘15.8.30(납품요구일 ’15.6.5)

○ 계약금액 : 31,503,600원(품대계 31,334,400원, 수수료 34,000원)

○ 업 체 명 : ㈜케이씨리버텍  대표 이명훈

	중랑캠핑숲 시설정비공사
‣위 치 : 중랑구 망우동 56번지 일대(중랑캠핑숲) ‣내 용 : 계류 및 배수로, 산책로, 안내판 등 정비 ‣공사기간 : ‘15.5.29 ~ 8.28 / ‣도 급 비 : 165,495천원(관급비 74,724) - 코코넛네트 포장(W1200×T20) : 894.8㎡(745.5m)

□ 조달물품 변경내용

○ 수량 및 금액 변경

구분	품명	수량 (m)	단가	금 액			비고
				품대계	수수료	합계
변경전	식생매트 (W1200*T20)	921.6	34,000	31,334,400	169,200	31,503,600
변경후	식생매트 (W1200*T20)	761.6	34,000	25,894,400	139,820	26,034,220

○ 납품기한 변경 : 없음

○ 변경사유 : 공사 설계내역과 조달구매 수량 차이로, 반납(160m)

붙임 : 설치사진 1부.  끝.