준공기한 연기 보고

결재	주무관	시설관리과장
	함인석	07/30 남정열

	명에 의거 담당 구역내 급수공사를 시행하던 중 아래와 같이 준공기한 연기 사항이 있어 보고합니다.
2015. 7. 30
보 고 자 : 직 성명 : 지방시설주사보 함인석

보 고 내 용
건 명	준공기한 연기 보고(암사동 433-120외 4개소)
내용	1. 위 치 : 암사동 433-120번지, 암사동 522-23번지, 암사동 598-3번지 상일동 134번지, 암사동 486-63번지 2. 보고내용 - 상기 위치는 계속되는 우천으로 인하여 공사기간내에 공사완료가 불가 하여 연기를 요청한 사항임. 3. 조치의견 - 우천으로 인하여 공사기간내에 공사완료가 불가한 사항으로 준공기한을 아래와 같이 연기하여 공사시행에 만전을 기하고자합니다. ◆ 당초 공사기간 : ’15. 7. 21 ~ 7. 31 ◆ 변경 공사기간 : ’15. 7. 31 ~ ’15. 8. 12 4. 지체상환금 부과여부 : 미부과
비 고