함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 통수 추진 관련 회의결과 통보

1. 배수과-5601호(2015.8.13.)와 관련입니다.

2. 봉은배수지 통수 추진 관련 그간 추진사항 점검 및 향후 추진일정 협의를 위한 회의를 개최하고 붙임과 같이 회의결과를 통보합니다.

◈ 통수 추진일정

○ 봉은배수지 항 벽체 누수복구(긴급) ------------------------ 8.21(금)

○ 누수부위 확인 및 관계자 회의 -------------------- 8.24(월) 14:00                 ○ 배수지 퇴수 및 항 청소 ----------------------------------- ~8.28(금)

○ 배수지 담수 및 수질검사 --------------------------- 8.31(월) 10:00

○ 봉은배수지 급수구역 고립(추진일정 병행) ----------------- 8.31(월)

○ 봉은배수지 통수 추진 ------------------------------- 8.31~9.25까지

붙임 : 1. 봉은배수지 통수추진 회의결과 1부

2. 회의참석 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,시설과장,강남수도사업소장(급수운영과장),강남수도사업소장(시설관리과장),암사아리수정수센터소장(정수과장)
★주무관	김진성		배수과장	이임섭		급수부장	08/17 이규상
협조자	주무관	김지환
시행	배수과-5687	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부(4층)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	대시민공개