함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의 여과지 절단작업에 따른 공급량 조정 추진계획 송부 및 협조요청

1. 배수과-5494호(2015.8.7.) 및 시설과-5962호(2015.8.18.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 구의정수센터 여과지 월류웨어 높이 조정작업을 8.29.(토) 재시행하기 위한 공급량 조정 요청(구의 50만톤/일 ⇒ 25만톤/일, 14시간)에 대해 아래와 같이 조치하고자 하오니 급수운영에 차질이 없도록 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 구의 여과지 작업을 위한 공급량 조정 재시행 세부 추진계획

- 조정일시 : 2015. 8.29.(토) 10:00 ~ 24:00(14시간)

※ 8.14.(금) 시행된 1차 작업은 양수작업에 많은 시간소요로 작업중단

- 작업내용 : 여과지 정수거 월류웨어 절단작업(철근콘크리트 4m×0.5m×0.4m)

① 작업구간 퇴수 및 작업용 비계 설치(3hr) ⇒ ② 절단작업(코어드릴 48공, 8hr) ⇒ ③ 정리 및 청소(3hr) ⇒ ④ 통수추진 및 정상급수

- 작업기간 중 구의 생산량 조정 : 50만톤/일 ⇒ 25만톤/일

◈ 작업 추진을 위한 관련부서 협조사항

- 시설안전부 시설과 : 작업전 철저한 사전준비(양수를 위한 투입장비 최대한 확보 등)로 당초 계획된 공사시간보다 최대한 단축하여 단수시간 최소화

- 구의, 뚝도 정수센터 : 절단작업중 대현산배수지 공급계통 공급량 부족을 대비하여 실시간 공급량 확인하여 탄력적인 송수펌프 운영(각정수센터별 여유물량 최대한 활용)

- 동부수도사업소 : 8.29.(토) 09:00 까지 관련배수지 만수위 확보

· 구의(아차산, 용마), 뚝도(대현산, 와우산, 남산, 보광)

· 작업중 대현산배수지 급수수계의 수질, 수압, 유량 변동사항 실시간 체크하여 이상유무 확인

- 작업추진간 현장상황 확인 및 급수운영 추진을 위한 비상근무조 편성, 운영

· 근무기간 : 8.29.(토) 09:00 ~ 작업완료 후 정상급수시까지

· 비상근무 부서 : 본부 배수과, 시설과, 급수운영과, 구의, 뚝도정수센터, 동부수도사업소

따로붙임 : 1. 작업관련 관계자 비상연락망 및 급수운영 검토 회의자료(배수과) 1부

2. 작업 추진 계획서(시설과) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,급수운영과장,시설과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	김지환		배수과장	代신근호		급수부장	08/20 代박기범
협조자
시행	배수과-5811	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개