문서번호	보행자전거과-10873
결재일자	2015.8.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자전거시설팀장	보행자전거과장
변재홍		이성환	08/20 이방일
협조

『공공자전거 운영지역』

자전거도로 구축 예산배정 변경보고

2015. 8.

도시교통본부

(보행자전거과)

『공공자전거 운영지역』 자전거도로 구축 예산 재배정 변경보고

`15년 10월부터 공공자전거가 운영개시 됨에 따라 자전거도로 구축사업이 경찰청 규제심의 과정에서 일부 노선이 추가․수정되어 자치구로 재배정된 예산을 변경 재배정하고자 함.

□ 관련근거

❍ `15.06.22 :  서울형 공공자전거 운영에 따른 자전거도로 확충계획(본부방침)

❍ `15.07.15 : 공공자잔거 운영에 따른 자전거도로 구충예산 재배정(시 → 자치구)

❍ `15.08.17 : 자전거도로 확충예산 추가 배정요청(마포구 → 시)

-  경찰청 규제심의시 추가된 사항반영으로 예산부족함으로 추가배정 요청

□ 예산집행 변경내역

❍ 당초 예산 배정액 : 총 355백만원(총 6개 자치구)

❍ 예산 재배정액(시비 지원금액)

(단위 : 천원)

구분	당초사업비	변경사업비	증감액	비 고
계	355,000	355,000	-
종로구	57,000	57,000	-
중구	89,000	89,000	-
성동구	14,000	14,000	-
광진구	19,000	19,000	-
서대문구	108,000	80,900	감 27,100
마포구	68,000	95,100	증 27.100	교통심의사항 추가

□ 예산과목

❍ 자전거 이용시설 확충 및 관리, 공공자전거 운영, 시설비

□ 조치계획

❍ 자전거도로 확충계획 예산범위내에서 자치구별로 공사추진에 지장이 없도록 자치구 별로 예산 재배정 조치하고자 함.

❍ 공공자전거 운영개시전에 자전거도로 설치완료함으로 시민편의 제공

□ 향후계획

❍ `15. 8월 : 자전거도로 규재심의 완료 및 공사시행

❍ `15. 9~10월 : 공사 완료

❍ `15. 10월 : 자전거도로 노선인정고시.

붙임 : 관련 공문사본 1부. 끝.