현 장  설 명 서

1. 공 사 명 : 풍납취수장 침사지 준설공사

2. 공사목적

○ 풍납취수장 침사지내 퇴적물을 준설하여 안정적인 원수공급으로 맑고 깨끗한 아리수 생산에 만전을 기하고자함.

3. 공사개요

○ 참사지 준설	: 953㎥

4. 공사기간

○ 착공일로부터 60일간으로 한다

5. 공사예정공정표

공 정 작 업 명	공사 예정기간						비 고
	10	20	30	40	50	60
작업준비
부지정리 및 휀스설치
준설 및 건조
주변정리

일 반  시 방 서

1.  본 공사는 풍납취수장 침사지 준설공사에 한하며, 설계도서 및 시방서에 따라 책임기술자(이하 “감독원”)의 지시에 따라 시행한다.

2.  도급자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사 전반에 대한 상세한 공정 계획을 수립하여 공사 착공전에 발주처에 제출하여야 한다.

3.  도급자는 도급자의 부담으로 감독이 지시하는 크기의 착공전, 중, 후의 주요 공정 사진을 제출하여야 한다.

4.  도급자는 공사를 성실히 수행하기 위하여 현장대리인을 공사시행 중에 반드시 선임 및 상주토록하고 공사 시행중 발생된 민․형사상에 책임을 진다.

5.  공사인부에 대하여는 안전교육 및 안전장구를 갖추게 하여 안전에 만전을 기한다.

6.  설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항이라도 공사 성질상 필요하다고 인정될시 발주처와 협의하여 시행하여야 한다.

7.  공사중 도급자의 부주의로 공익상 피해 또는 인명피해 및 사유재산에 미치는 손해가 발생 하였을 때 도급자의 부담으로 배상 또는 원상복구 후 감독원의 확인을 받아야 한다.

8.  공사에 사용되는 모든 자재는 KS 등 공인된 규격품, 또는 이와 동등한 이상의 자재를 사용하여야 한다.

9.  설계 변경은 설계내용과 공사 시공여건이 현저히 차이가 발생한 경우, 감독원의 사전 승인을 득한 후 설계변경을 할 수 있다.

10. 본 공사는 공사기간 중에 원수공급에 차질을 주지 않는 한도 내에서 감독원의 지시에 의거 시행한다.

11. 공사 중 발생한 각종 발생품은 감독원의 지시에 따라 지정한 장소에 정리, 반납한다.

12. 공사가 준공 처리된 사후라도 설계상 과다계상 및 부족 시공한 사실이 발견되어 부당이익이 판명되었을 경우 도급인은 해당 금액을 환불 조치하여야 한다.

13. 본 공사의 시행함에 있어 해석상의 이견이 있을 경우 발주처의 협의하여 시행한다.

특 별  시 방 서

1.  본 공사는 영등포아리수정수센터 풍납취수장 침사지 준설공사에 적용한다.

2.  본 공사 구간은 풍납취수장의 침사지로서 구역의 특성을 고려하여 준설로 인한 2차 오염이 없어야 하며, 장비로 인한 기름 유출이 없어야 한다.

3.  본 공사의 도급자는 현장여건을 면밀히 검토하여 공사에 필요한 사항들을 사전에 점검하고, 이상이 있을시 발주처에 즉시 보고하여야 한다.

4.  본 공사는 상수도에 이용하는 원수이므로 기름 유출이나, 기타 수질오염에 해당되는 장비 또는 물품을 사용해서는 않된다.

5. 본 공사는 장비를 사용하여 준설하는 방법이므로 안전에 특히 주의하여야 하며, 시설물을 작동시에 발주처에 보고 후 작동하여야 하며, 시공중의 안전사고에 대한 책임은 전적으로 도급자에 있으므로 작업에 필요한 안전교육을 실시하여야 한다.

6. 본 공사의 퇴적토 이송이라 함은 한강 고수부지로를 말하며 퇴적토를 쌓을 수 있는 제반 시설을 설치한 후 준설을 실시하여야 한다.

7. 공사전 도급자는 한강 관리주체인 한강관리사업소에 점용허가를 득한 후에 실시하여야 하며, 기타 관리청에서 요구하는 사항에 대하여 충족 및 충분한 검토 후 이행 하여야 한다.

8. 본 공사의 시공 장소는 한강시민 공원과 인접하고 있어 안전에 특히 주의하여야 하며, 야간에 한강시민 공원을 이용하는 시민의 안전을 위하여 야간 유도등을 설치하여 민원이 발생되지 않도록 최선을 다하여야 한다.