의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-166	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,물순환정책과장,교통정책과장

주무관	치수계획팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
엄기숙	손경철	이진용	09/01 김학진
협 조
	물재생계획과장			신현태

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 874번, 함진규 의원, 국토교통위원회)

의원님께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

함진규 의원(국토교통위원회, 새누리당)

□ 요구번호 : 874번

□ 요구내용

33. 최근 3년간 서울시 도로침수현황(강남역, 광화문역 인근 포함)

개선사업 현황

33-1 강남역 침수해결 설계용역사 계약 및 설계용역 컨소시엄

채무불이행 내역

33. 최근 3년간 서울시 도로침수현황 개선사업 현황

□ 최근 3년간 서울시 도로침수 현황은 없으며, 우리 시에서는 지난 2010,     2011년 침수피해 이후 강남역, 광화문 주변 등 주요 침수 취약지역에     대하여 개선사업을 추진하고 있음

○ 사업개요(34개소 침수취약지역)

- 특별관리지역 : 신월지역 등 11개소

- 중점관리지역 : 오류동역 주변 등 16개소

- 기타관리지역 : 공릉초교 주변 등 7개소

○ 개선사업 추진 현황

2015	2016	2017	2018	2019
5개소	3개소	10개소	6개소	1개소
∘신촌현대백화점 일대(완료) ∘성대시장 일대 (완료) ∘풍납1,2동 주민센터 ∘공릉초교 일대 ∘공항펌프장 일대	∘신천지역 ∘잠원지역 ∘용답동답십리 일대	∘대치역사거리 ∘광화문 일대 ∘한강로 일대 ∘신월지역(2개소) ∘강서구청사거리 ∘시흥사거리 일대 ∘내방역사거리 일대 ∘암사역 주변 ∘오류동역 주변	∘도림천(3개소) ∘사당역 일대 ∘길동 일대 ∘망원유역 일대	∘강남역 일대

※ 34개소 침수취약지역 중 ’15. 8월까지 11개소 주요 대책사업 완료

- ’13년(5개소) : 구의·자양, 면목동, 미아삼거리, 장위동, 가산디지털단지역 일대

- ’14년(4개소) : 영림초교, 장안1동 주민센터, 선릉역, 을지로입구역 일대

- ’15년(2개소) : 신촌현대백화점 일대, 상도동 성대시장 일대

붙임 주요 침수취약지역(23개소) 사업 추진현황 1부.  끝.

(붙임)

주요 침수취약지역 사업 추진현황

▢ 시행중인 사업 : 23개소(특별관리 10개소, 중점관리 10개소, 기타관리 3개소)

침 수 취약지역	주 요 사 업	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비 고
광화문 일대	∘ 하수관거 개선(870m) ∘ 세종로 주차장 저류조(1.5만톤), 유입시설 103개소 확충	’12~’14년	사업완료	100	특별관리
	∘ 저류시설 유입관로 개선(0.22km) ∘ C자형 관로 개선(0.85km)	’14~’17년	∘ 기본 및 실시설계중 (’14.5~’15.10) ※ 공사시행 (’15.11~’17.12)	-
강남역 일대	∘ 용허리저류조(15,000㎥), 격벽 철거(39개소), 빗물유입시설 확충	’13~’15년	사업완료	100	특별관리
	∘ 배수구역 경계조정(116.5ha) ∘ 유역분리 터널 (D=7,500mm, L=1.3km)	’15~’19년	∘ 기본 및 실시설계 발주 입찰 공고 중	-
용산 한강로 일대	∘ 빗물유입시설 확충(한강로 횡단 140개소, 연속형 107m) ∘ 만초천 교량 재설치	’12~’14년	사업완료	100	특별관리
	∘ 펌프장 신설(1,010㎥/분) ∘ 유역분리 관거 (신설 1.03km, 개량 1.30km)	’13~’17년	∘ 펌프장 가시설 설치중 ∘ 유역분리관거 굴진기지 설치중	12
신월 지역 (2개소)	∘ 오금펌프장 증설(3,650㎥/분), 하수관거 개량(0.85km)	’11~’13년	사업완료	100	특별관리
	∘ 빗물저류배수시설(터널 3.61km), 유도터널 2개소, 수직구 6개소	’11~’17년	∘ 수직구 2개소 완료 터널 굴착중(230m 완료)	15
	∘ 신월1,2,3 및 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비	’11~’17년	∘ 신월1 하수관로 (2.7㎞완료) 설치중 ∘ 신월2,3 및 화곡2 실시설계중	-
동작 사당역 일대	∘ 임시저류조 2개소 설치 (45,000㎥, 15,000㎥)	’13~’14년	사업완료	100	특별관리
	∘ 하수관거 개량(0.86㎞)	’15년	∘ 하수관거 0.3㎞ 개량 완료	40
	∘ 빗물저류배수시설(3.71km), 저류조(2개소) 등	’11~’18년	∘ 기본설계(‘15.8월) 및 실시설계(’16.6월)중 ∘ 민자 도로터널 연계검토중	-
	∘ 이목·사당 배수분구 하수관로 종합정비(63.7km)	’16~’18년	∘ 설계완료(‘11년) ∘ 사당역 배수개선대책에 따라 착공예정	-

침 수 취약지역	주 요 사 업	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비 고
도림천 일대	∘ 도림천 유수장애 교량 재설치 (신림3교, 충무교)	’13~’14년	사업완료	100	특별관리
	∘ 도림천 하상정비(1.2km)	’13~’14년	사업완료	100
	∘ 빗물펌프장 신증설 신림2(800㎥/분), 신림5(410㎥/분), 조원동(320㎥/분)	’12~’15년	사업완료	100
	∘ 저류조 설치(버들골 2만톤, 공대폭포 5천톤, 서울대정문앞 4만톤)	’12~’17년	∘ 버들골 및 공대폭포 (설치완료)	100
			∘ 서울대정문앞 구조물 기초공사 중	60
	∘ 도림천 방수로(국비)	’16~’18년	∘ 안양천권역 하천기본 계획 수립중(’15.12월)	-
	∘ 대림 및 신림4 배수분구 하수관로 종합정비	’12~’18년	∘ 침수취약지역내 하수관 정비 완료	100
길동 일대	∘ 하수관거 개량(4.46km)	’15~’18년	∘ 착공(’15.7), 지장물 조사 중	5	특별관리
강서구청 사거리	∘ 하수관거 개량(2.51km)	’12~’17년	∘ 하수관로 1.35km 개량완료	60	중점관리
	∘ 등촌1 배수분구 하수관로 종합정비(31.2km)	’08~’15년	∘ 하수관로 28.4km 정비완료	90
	∘ 화곡1 배수분구 하수관로 종합정비(29.5km)	’10~’17년	∘ 하수관로 5.5km 정비완료	19
시흥사거리	∘ 시흥계곡 저류조 설치 (2.4만톤)	’12~’14년	사업완료	100	중점관리
	∘ 시흥천 확장(0.595km)	’15~’17년	∘ 실시설계(’15.5~12), 착공(’16.3)	-
	∘ 시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비(8.7km)	’12~’16년	∘ 하수관로 6.0km 정비완료	68
대치역 사거리	∘ 하수관거 신설(1.21km)	’11~’12년	사업완료	100	중점관리
	∘ 도곡 빗물펌프장 신설 (900㎥/분)	’14~’17년	∘ 실시설계 완료(’15.8), 착공(’15.10)	-
	∘ 대치 배수분구 하수관로 종합정비(16.9km)	’10~’18년	∘ 하수관로 2.5km 정비완료	14

침 수 취약지역	주 요 사 업	사업기간	추진현황	공정률 (%)	비 고
내방역 사거리	∘ 하수관거 신설(2.1km)	’13~’17년	∘ 하수관거 0.2km 완료, 지장물 이설	20	중점관리
암사역 일대	∘ 하수관거 개량(1.97km)	’15~’17년	∘ 실시설계 완료(’15.7), 착공(’15.9)	5	중점관리
공항펌프장 주변	∘ 공항 빗물펌프장 증설(860㎥/분)	’11~’13년	사업완료	100	중점관리
	∘ 마곡1(4,080㎥/분)펌프장 재설치, 마곡2(2,600㎥/분)펌프장 신설	’14~’16년	마곡2펌프장 완료(’15.4)	100
			∘ 마곡1펌프장 완료예정(’16.5)	-
망원 유역	∘ 하수관거 개량(1.0km)	’12~’13년	사업완료	100	중점관리
	∘ 빗물저류조 10만톤, 하수관거 개량 418m	’14~’18년	∘ 기본 및 실시설계 완료(’15.12) ∘ 착공(’16.3)	-
	∘ 동교 배수분구 하수관로 종합정비(17km)	’14~’18년
오류동역 주변	∘ 오류천 확장(1.7km)	’15~’17년	∘ 설계완료(’15.12), 착공(’16.3)	-	중점관리
	∘ 오류1 배수분구 하수관로 종합정비(20.5km)	’11~’17년	∘ 하수관로 10.6km 정비완료	52
풍납 1,2동 주민센터 주변	∘ 하수관거 개량(4.99km)	’12~’15년	∘ 하수관거 4.04km 개량	93	중점관리
잠원 지역	∘ 잠원2빗물펌프장 신설 (1,400㎥/분)	’12~’16년	∘ 민원으로 사업계획 변경(’15.6) ∘ 자연방류관로 우선 설치	10	중점관리
신천 지역	∘ 신천펌프장 유입관로 개량 (2.71km)	’12~’16년	∘ 유입관로 1.1km 개량	43	기타 관리
공릉초교 주변	∘ 공릉2 빗물펌프장 신설 (520㎥/분)	’12~’16년	∘ 구조물 공사중 (’16.4완료예정)	45	기타 관리
	∘ 공릉1 배수분구 하수관로 종합정비(27.9km)	’09~’15년	사업완료	100
용답동 답십리역 일대	∘ 용답 빗물펌프장 증설 (352㎥/분)	’11년	사업완료	100	기타 관리
	∘ 하수관거 개량(0.55km)	’15~’16년	∘ 가시설 및 PC BOX 부설중	5

작성자	기관명	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	손 경 철
	☎2133-3867	주무관	박 정 훈
	작 성 일 : 2015. 9. .

33-1. 강남역 침수해결 설계용역사 계약 및 설계용역 컨소시엄 채무불이행 내역

□ 계약내역

(단위 : 백만원)

업 체	최초계약	선급금	변경계약 (타절준공)	비고
㈜동호	560	224	-
㈜범한	472	189	484
현대엔지니어링㈜	442	177	208
합계	1,474	590	692

□ 하도내역 : 제일엔지니어링(496백만원)

(단위 : 백만원)

업 체	최초계약	하도금액	지급내역	비고
㈜동호	560	273 하도금 273백만원은 동호의 파산당시 기성률인 40%에 대한 공익채권 (109백만원)이 법원에 신청되어 변제절차를 진행중임.	-	동호 파산
㈜범한	472	223	187	36백만원(잔액)
현대엔지니어링㈜	442	-	-
합계	1,474	496	187

□ 변경계약 : 타절 준공시

(단위 : 백만원)

업 체	타절준공정산	하도금액	지급내역	잔액
㈜동호	-	-
㈜범한	484	270 (추가 정산분 47백만원 포함)	187 - 계 187	83 (추가 정산분 47백만원 포함)
현대엔지니어링㈜	208	-	-	-
합계	692	270	187	83 83백만원은 범한이 제일에게 지급하기로 협의가 완료된 상태로 현재 처리 중임.

끝.

작성자	기관명	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과 물재생계획과)	담당사무관	심 형 보 김 준 형
	☎ 2133-3886 ☎ 2133-3783	주무관	윤 희 성 김 병 오
	작 성 일 : 2015. 9. .