문서번호	기반시설과-745
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기반시설과장	시설부장
권혁제		한흥태	09/01 박상돈
협조
	주무관		박중모

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

작업인원 정산 실정보고 검토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  8.  .

시설부 기반시설과

-‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사 -

작업인원 정산 실정보고 검토

수영장 보수 및 운영기간(7.17~8.23) 중 작업인원 정산에 대한 시설공단의 실정보고 내용 검토 및 처리계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-7712호(2015. 8. 27)

Ⅰ		공사개요

공 사 명 :‘15년 한강공원 야외수영장 보수공사

공사내용 : 풀 바닥 타일설치 3,198㎡, 풀 바닥 및 벽체 도장 24,000㎡ 등

공사기간 : 15. 3. 13 ~‘15. 10. 1.

시 공 사 : ㈜ 평광건설

도 급 비 :  1,607,638천원

Ⅱ		실정보고 내용

작업인원 정산

□ 내역에 반영된 작업인원은 120명이나, 보수물량 증가로 작업인원 7인 증

▹주요 증가사유 : 운영부서 요청에 따른 그늘막 청소 및 목재테크 정비

□ 작업 공종별 작업인원(2인 1조) 및 작업시간 산정

▹장비가 사용되지 단순 보수작업 : 4시간×2인 =  8시간 (건당  1인 적용)

▹소규모 장비를 사용한 복합작업 : 6시간×2인 = 12시간 (건당 1.5인 적용)

▹단순과 복합작업이 병행된 보수 : 8시간×2인 = 16시간 (건당  2인 적용)

□ 작업인원 정산내용

구 분	작 업 내 용	내역 상 작업인원	정 산 작업인원	비고
뚝 섬	유수풀 주변 바닥블럭 정비 등 19건	20	34	작업 전 준비시간 및 작업 후 현장정리와 현장이동시간 포함 됨.
여의도	맨홀 구체콘크리트 보수 등 7건	20	17
망 원	풀 내부 배수구 주변 콘크리트 정비 등 8건	20	14
잠 실	풀 내부 배수구 주변 콘크리트 정비 등 10건	15	23
잠 원	그늘막 파손 정비 등 5건	15	10
광나루	그늘막 청소 등 5건	15	7
난 지	목재테크 보수 등 10건	15	22
계	64건	120	127

Ⅲ		보고내용 검토

검토내용

□ 작업인원 정산

◦ 현장여건 및 공종별로 분류하여 작업인원과 작업시간을 산정하여 정산하였음     으로 적정함.

◦ 내역서 상 작업인원 120인 ⇒ 정산 작업인원 127인 (증 7인)

□ 개략 공사비

구 분	단위	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
작업인원 증가	천원	11,829	12,519	690	제경비 약 65%적용 (정산보험료 제외)
제 경 비		7,690	8,133	443
계		19,519	20,652	1,133

□ 증액비용 조치

▹가용예산 범위 내에서 향후 설계변경 시 증가물량 반영.

Ⅳ		처 리 계 획

시설공단의 실정보고 건 승인 및 향후 설계변경 시 증가된 물량을

상세검토 후 가용예산 범위 내에서 정산 처리토록 지시하고자 함.

첨 부 : 시설관리공단 공사감독1처-7712호(2015. 08. 27.) 1부.    끝.