[별지 제29호서식] <개정 2013.3.23.>							(앞쪽)
		□ 하천점용허가								처리기간
							신청서
										뒤쪽 참조
		□ 하천예정지에서의 행위허가
		□ 홍수관리구역 안에서의 행위허가
신청인	①성명 (법인의 명칭)		서울특별시 교량안전과		②주민등록번호(법인은 대표자의 성명 및 주민등록번호)				대표자 ,박원순 104-87-00469
	③주 소		서울시 중구 덕수궁길 15			④전화번호		02-2133-1943
점용(행위)개요	⑤하천명		한 강
	⑥점용(행위)위치		마포구 망원동 312-3 (컨테이너 사무실,창고 설치구간)		⑦점용(행위)면적				컨테이너 사무실 및 창고설치 :45㎡
	⑧점용(행위)목적		성산대교 보수공사에 의한 컨테이너 사무실, 창고 설치
	⑨점용(행위)기간		2015년 9월 10일부터 ~ 2015년 11월 14일까지
「하천법」 제33조제1항(제38조제1항), 같은 법 시행령 제34조제1항(제45조제1항) 및 같은 법 시행규칙 제17조제1항(제20조제1항)에 따라 위와 같이 하천점용허가 (하천예정지/홍수관리구역 안에서의 행위허가)를 신청합니다. 2015년 9월 일 신청인 서울특별시장 교량안전과 (서명 또는 인) 한강사업본부 귀하
※ 비고 점용목적은 「하천법」제33조제1항 각 호와 같은 법 시행령 제35조제1항 각 호의 행위 별로 그 명세서를 구체적으로 적습니다.											수수료
											뒤쪽 참조
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

하 천 점 용 허 가 요 청

(성산대교 보수공사)

2015. 09.

천 웅 기 연 ㈜

목        차

1. 사무실 설치 위치도

2. 수방 대책 계획서

3. 공사 계획서

4. 가설 사무실 평면도

1. 사무실 설치 위치도 (서울시 마포구 망원동 312-3)

점용면적

A=3X15=45m2

1-2. 관련사진

점용면적

B=3x15=45

점용면적

B=3x15=45

2. 성산대교 호우 시 사무실 및 창고 이동 위치도

사무실 위치

이동위치

3. 현장사무실 및 창고 이동 위치도

2. 수방대책 계획서

1. 목    적

Ⅰ. 본 계획서의 목적은 풍수해로부터 현장을 보호하고 재해에 관한 사전 예방 대책과 재해발생시 응급 및 복구 대책을 수립하여 피해를 최소한 절감시켜 안전시공을 도모하고자 한다.

Ⅱ. 아울러, 본 계획서의 적용현장은 “성산대교 보수공사”이고, 해당 공사가 이뤄지고 있는 장소는 서울특별시 마포구 망원동~영등포구 양평동 구간 성산대교이다.

2. 방    침

가. 재해의 극소화를 위한 방재활동

나. 위험요소의 주기적 점검 및 자율책임 관리

다. 각종 수방자재 확보 및 사용가능상태 유지관리

라. 유관기관의 상호 유기적 협조로 신속한 재해예방 및 복구활동 체제유지

마. 재해발생시 보고 및 연락체계확립 및 신속대처 능력배양

바. 신속한 복구 및 재해 기록을 분석하여 예방

3. 재해대책반 임무

○ 임   무

가. 행정 및 대책반

- 풍수해 대책에 대한 행정지원

- 단계별 사태 발생에 따라 비상소집

- 재해상황에 따른 방송청취

- 단계별 근무자 지정 및 복무사항

- 풍수해 대책 계획수립

- 각종 기상에 경보발령 및 해제에 관한 사항

- 유사기관 협조체제 유지강화

- 피해 상황 총괄 및 보고

- 유관기관 간의 수해 대책에 관한 협의

나. 복  구  반

- 풍수해 사전 대책 확인 점검

- 피해통계 작성 및 보고

- 복구계획서 작성

- 피해 상황 현지 조사

- 복구용 중기동원 및 인원관리

다. 지  원  반

- 사태발생시 복구반 지원

- 제반 예상지원 및 조치

- 복구상황점검

- 기타점검사항

- 현장소장 지시에 따름

4. 폭우에 대한 대책

가. 폭풍,폭우등의 안전 대책

폭풍중의 악천우로 인하여 작업을 중지한 후 다시 작업을 재개할 때는 사전에

다음과 같은 사항에 대하여 점검을 실시한 후에 작업재개

1) 호우예보 시 컨테이너 사무실을 강변북로 높은 지대로 이동한다.

2) 수위가 낮아지는것을 확인한 후 컨테이너 사무실을 다시 이동시킨다.

5. 감전예방 대책

가. 임시 수전설비 상태를 점검한다.

1) 수전설비 설치위치의 적정성

2) 전기보안 규정에 따른 순찰 및 점검기록 상태

3) 출입금지 범위설정 및 출입금지 명기 여부

4) 가공선로 보호카바 설치 상태

나. 임시 분전반 설치상태를 점검한다.

1) 분전반 옥외 설치시 비, 바람으로부터 안전한 옥외형

2) 충전부 내부 보호판 설치 등 보호조치

3) 외함접지 상태

4) 누전차단기 설치 및 작동 상태

5) 전기 인출 시 누전차단기 연결 유무

6) 콘센트와 플러그에 의한 전원 인출 유무

7) 외함에 회로도, 회로명 표시

8) 외함 시건창치 및 안전표지판 부착

다. 이동형 전기 ․ 기계 기구 상태를 점검한다.

1) 전선, 접점, 단자, 스위치 등 전기가 통하는 곳의 피복상태

2) 작업전 점검 및 정기점검 유무

3) 전기 ․ 기계기구 접지

4) 누전차단기 부착 또는 누전차단형 콘센트 사용 유무

5) 이동용 조명기구 및 매달기식 전등의 보호망 유무

6) 투광등 전선인입부 절연고무 손상유무

7) 단말부위 충전부 태핑 등 절연 유무

8) 전선의 노후화 및 손상유무

라. 이동전선 및 가설배선 상태를 점검한다.

1) 배선의 가공설치 등 작업장 바닥에 전선방치 유무

2) 전선이 차량 등 중량물의 통로상에 노출 유무

3) 전선 피복 파손 유무

4) 습윤장소에서 사용하는 전선 및 접속기의 성능

5) 충전부 노출 유무

6) 전선이 고열물에 인접 또는 접촉 유무

7) 문어발식 배선 유무

6. 하절기 건강장애 예방조치

가. 혹서기에 하루중 기온이 가장높은 오후 1시~3시 사이에는 가능한 외부작업을 삼간다.

나. 건강장해가 발생된 작업자에게는 즉시 응급처치를 한다.

1) 열실신

① 서늘한 곳에 작업자를 눕히고 수분내에 회복되지 않으면 병원으로 후송한다.

2) 열경련

① 0.1% 식염수를 마시게 한다(물1리터에 소금 한 티스푼정도).

② 경련이 일어난 근육을 마시지 한다.

3) 열피로

① 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.

4) 열사병

① 지체없이 입원하여야 하며 구급차를 기다리는 동안 다음의 응급처치를 실시한다.

- 환자를 서늘한 장소로 옮겨 열을 식힌다.

- 환자의 옷을 시원한 물로 흠뻑 적시고 몸을 선풍기 등으로 시원하게 해준다.

7. 근무체계

○ 비상시 : 3단계 근무체계

구 분	조 건	활 동 방 법
제 1단계 준비단계	호우주의보 당일발생 예정 시	․ 기상예보접수 ․ 하천 내 작업장비 및 자재 안전지대 이동 ․ 수행 위험 개소 대책 강구 ․ 작업자 하천 출입통제 ․ 수방자재 및 기동력확보 ․ 2단계 조치사항 준비
제 2단계 경계단계	호우주의보 발령 시	․ 반별 임무 수행 ․ 수방자재 및 장비 점검 ․ 각종 피해 및 조치사항 보고 ․ 수해 발생 시 보유장비 및 인원 ․ 자재 신속한 동원 ․ 제3단계준비
제 3단계 비상단계	호우경보 발령 시	․ 2단계 조치사항 계속 수행 ․ 현장보유장비 및 자재투입 ․ 복구계획인 작성 및 이행 ․ 방호활동

수방대책 편성도

							수 방 대 장
							현장 소장	장 판 호
											수방조장
											팀장		박 근 규
상황대책반					인력동원반						복구작업반								장비동원반
과장	신 정 희 *************				과장	신 정 희 *************					반 장	김 삼 수 *************							장비업체	김 삼 수 *************
- 피해사항 접수 및 상황보고 - 경보전파 및 조직별 임무명령 - 유관기관 보고 - 수재예방 사전 보고 - 수재전 임무숙지 교육 및 훈련 - 수재복구시 상황 점검 및 보고 - 근무일지 기록					- 인력구조계획 수립 - 상황발생시 응급 조치 - 구조.복구활동 - 피해확산방지 조치 - 사후대책수립 - 이재민 관리 - 방역실시						- 단계별 근무지시 에 의거 근무 및 재해예방 작업 - 주요취약지점 점검 및 순찰 - 필요시 적정 소요량 파악/ 지원 - 수재확산 방지 작업								- 소요장비파악 - 장비 비상연락 체제구축 - 비상훈련실시

비상 연락망

감 독 처			본 사					발 주 처
한국건설관리공사 공사감독:김석원 02-2136-5008			천웅기연(주) 02-425-4455					서울시 도시안전본부 담당공무원:김귀용 02-2133-1943
경 찰 서			현 장					소 방 서
마포경찰서 02-393-0112			현장대리인 장판호 전화: *************					성산119 안전센터 02-304-0119
노 동 부			전기･통신･도시가스					병 원
시설관리공단 2290-6114			한국통신 100 한국전력공사 123					이대목동병원 02-2650-5114

비상 대기조

									현장소장
									장 판 호
									*************
						대기조
						팀 장		박 근 규				010-3796-915.
						업무지원		신 정 희				*************
						지게차		가나지게차				02-325-6000

8. 수방자재확보

자 재 명	확 보 계 획	확 보 실 적	부족량 조치계획
비 닐 우 의 장 화 삽	5 롤 5 개 5 조 5 개	5 롤 5 개 5 조 5 개	- - - - -

9. 수방장비확보

장 비 명	확 보 계 획	확 보 실 적	부족장비 조치계획
지 게 차 양 수 기	1대 1대	1대 1대	- -

10. 업무흐름도

			사고발생
	119구조대 출동요청 및 현장대리인(감독자)에게 사고발생 통보 (작업반장 → 감독, 현장대리인)				부상자 보호 및 차량․보행자 통제 (작업반장, 신호수)
			사고지점 도착 및 확인 (감독, 현장대리인)
	사고발생 보고 (현장대리인 → 감독,발주청)				부상자 구급이송 및 지원장비·인력 동원 (현장대리인)
					사고 잔재물 수거처리 사고지점 응급복구 (지원장비·인력)
	사고조치 완료보고 (현장대리인 → 감독,발주청)

3.공사계획서

1. 공사개요

- 사 업 명 : 성산대교 보수공사

- 사업목적 : 본 공사는 정밀안전진단과 및 정밀점검 결과 아스팔트 포장부 등 시설물 손상부에 대한 보수 . 보강를 시행하여 교량의 안전을 확보하는데 있음.

- 위    치 : 마포구 망원동 ~ 영등포구 양평동 (성산대교)

- 공사기간 : 2015. 08. 17.   ~  2015. 11. 14.

- 사업내용

공 정 명	규 격	수량	비고
1. 포장보수공 절삭후 아스팔트 덧씌우기	개질아스콘(#67) WC-6	63.87a	T=8cm
2. 방수보수공 도막방수	슈프림데크코트 M6,야간	6,387㎡
3. 신축이음보수공 중분대차수joint 물끊기공	OMEGA, 50~70# AL형,주간	236m 222m
4. 콘크리트보수공 콘크리트 균열보수 콘크리트 표면보수 콘크리트 단면보수	B=0.3mm,T=120mm DPCON,벽체,침투식 EG프로텍터,t=10mm(벽체)	169.3m 236m 12㎡
5. 기타보수공 강재도장, 빗금도색, 차선도색		2.39㎡ 118㎡ 266.3㎡

- 공 사 비(도급액)

총공사비	도급금액	관급자재비	이전비
금 877,917,900 원	금 709,642,900 원	금 130,680,000 원	금 37,595,000 원

- 성산대교 위치도

- 성산대교 전경

상부전경(망원동→양평동 방향)	측면전경(망원동→양평동 방향)

2. 시공관리체계 (현장조직도)

발주처				서울특별시 교량안전과							감독 기관				건설산업관리단 한국건설관리공사						대표 이사				천웅기연(주) 김 홍 열
				02-2133-1943											02-2136-5008										02-425-4455
											현장 대리인				장 판 호
															*************
안 전				이 용 호							품 질				신 정 희						공 사				장 판 호
															*************
				*************																					*************

※ 인원 및 장비투입계획

■ 인원투입계획

공 종	투입예정인원			비 고
	인 원	일 수	계
성산대교 보수공사
1. 포장보수공	15	5	75
2. 방수보수공사	12	5	60
3. 신축이음보수공	4	5	20
4. 콘크리트보수공	4	10	40
5. 도장보수공	4	5	20
6. 부대공	5	5	25
계			240

■ 주요장비 투입계획

공종	장비명	투입예정			비고
		수량	일수	계
포장보수공	노면파쇄기	1	5	5
	휘니샤	1	5	5
	마카담	1	5	5
	타이어로울러	1	5	5
	단뎀	1	5	5
	비후다	1	5	5
	싸인보드	2	5	10
	25t 덤프트럭	2	5	10
방수보수공	교반기	1	5	5
콘크리트보수공	리프트	1	10	10
	균열주입기	1	10	10
도장보수공	리프트	1	1	1
부대공	1t 트럭	1	60	60	공통
	지게차	1	2	2