투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약(1차) 체결 통보(2015년 건축시설물 유지보수공사-연간단가)

1. 물재생과-3615(2015.09.01.)호와 관련 『2015년 건축시설물 유지보수공사-연간단가』 건에 대하여 아래와 같이 변경계약(1차) 체결되었음을 알려드립니다.

가. 건       명 : 2015년 건축시설물 유지보수공사-연간단가

나. 계약 체결일 : 2015. 04. 01

다. 변경계약체결일 : 2015. 09. 07

다. 계 약 업 체 : ㈜범효건설  대표 오치식

라. 계 약 금 액 : 금327,282,000원(금삼억이천칠백이십팔만이천원)

ㅇ 계약금액 : 변동없음

마. 준 공 기 한 : 2015. 12. 31(변동없음)

바. 변 경 사 유 : 방화문교체 물량증가(창호공사), 천장텍스붙임 물량증가(수장공사), 우레탄방수 물량감소(방수공사)등 물량 증,감(내역서 별첨)

붙임 : 1. 공사변경계약 체결통보서 1부.

; 2. 설계변경 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	代김홍주		난지물재생센터소장	09/08 가길현
협조자
시행	관리과-8989	(		)	접수		(		)
우	10542	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426	/
전화	02)300-8516	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)