문서번호	방재시설부-12169
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	09/10 임춘근
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』와우교구간

지중 연속벽 처리계획 실정보고 검토

2015. 09

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』와우교구간

지중 연속벽 처리계획 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 와우교구간 지중 연속벽 처리계획에 대한

건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–730(2015.09.07)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 12,244백만원

Ⅱ

검토내용

○ 지중 연속벽 현황

- 매몰위치 : 경의선숲길 와우교구간

○ 철거 수량 및 처리계획

- 지중연속벽 : 약 530㎥

- 발생되는 폐기물은 건설폐토석으로 운반 및 처리

- 기타 혼합폐기물(토류벽 등)은 사업장 생활폐기물로 시공사 자체 처리

※ 1차공사 염리동구간 발생된 지중 연속벽 처리내용과 동일하게 시행

○ 개략 공사비 검토

(단위 : 천원)

구 분	단 위	수량 증,감	공사비 증,감	증,감 비고
1. 순공사비			증) 464
1) 사토	㎥	감)530	감) 13,270
2) 무근콘크리트깨기	㎥	증)530	증) 11,815
3) 폐기물상차	㎥	증)530	증) 1,919
2. 제잡비	식	증)1	증) 58
3. 폐기물처리	㎥	증)120	증) 4,800	혼합폐기물
4. 공급가액			증) 5,322
5. 부가가치세			증) 532
6. 도급액			증) 5 ,854
7. 폐기물처리용역	㎥	증)530	증) 34,000	별도발주용역
8. 총사업비			증) 39,854

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 경의선숲길 공원조성공사-와우교구간과 관련, 경의선 지하화 사업시 설치된 흙막이 및 차수 구조물에 대하여 식재 생육심도와 포장 단면 확보를 위해 철거함은 타당하며,

○ 발생 폐기물(지중 연속벽 및 토류벽 등)에 대한 처리계획과 철거수량, 소요비용은 적절하게 산출되었으며, 향후 실 시공수량으로 정산코자 함.

Ⅳ

보고자 의견

○ 경의선숲길 공원조성공사-와우교구간 터파기 및 조사결과 확인된 지중 연속벽 및 토류판 처리계획 실정보고에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보코자 하며, 차후 설계변경 시 반영토록 조치코자함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.