문서번호	방재시설부-12270
결재일자	2015.9.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	09/12 代이도헌
협조
	주무관		임성은

『경의선숲길 공원조성공사』신수동구간 우수처리계획 변경 실정보고 검토보고

2015. 09

도시기반시설본부

방재시설부

『경의선숲길 공원조성공사』신수동구간

우수처리계획 변경 실정보고 검토

「경의선숲길 공원조성공사」 신수동구간 우수처리계획변경에 대한

건설사업관리기술단 실정보고 검토 보고임.

▶ 관련근거 : 경의경춘(감) 제2015–710(2015.09.01)호

Ⅰ

공사개요

○ 공 사 명 : 경의선숲길 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 용산문화체육센터 ~ 가좌역

○ 규    모 : 공원조성 84,268㎡, L=3.48km

○ 사업기간 : 2013.9 ~ 2016.3

○ 공 사 비 : 12,244백만원

Ⅱ

검토내용

○ 현 황

- 신수동 A구간 위치도

○ 문제점 및 변경 사유

- 당초 신수동 A구간 우수표면수 처리는 북측 U형측구, 남측 잔디수로로 계획    되었으나, 잔디수로 구간(약 140m) 우수량이 적지 않아 주 우수처리계획     시설로 적합하지 않으며

- 타 우수시설(우수관로 및 구조물)에 비하여 내구성이 현저히 떨어져 공원     개장 후 원형 유지 및 유지관리가 어려울 것으로 판단됨.

○ 개선방안

- 신수동 A구간 우수처리계획 현황 (당초)

- 변경 우수처리계획

· 남측 잔디수로(L=140m)는 주 우수처리시설임을 감안하여 통수단면이 균일    하고 향후 유지관리가 용이한 원형수로관으로 변경 시공

· 연결관은 제외하고 U형측구 및 원형수로관은 각각 별도 집수하여 처리

· 우수처리 시설 미반영된 중앙부 북측 구간은 콘크리트 포장 옆으로 인접 식재와    어울림과 미관 고려한 잔디수로 설치

· 우수처리 계획 변경에 따라 집수정 개소 및 위치는 조정하고자 함.

○ 주요수량 변경현황

구 분	규 격	단 위	당 초	변 경	증 감
우수관로	D450mm	m	49.0	21.8	감) 27.2
	D300mm	m	128.5	38	감) 90.5
집수정	600*600	ea	8	8
	900*900	ea	3	2	감) 1
잔디수로	T100	m	139.4	54.0	감) 85.4
원형수로관	D300	m	120.0	254.4	증) 134.4
U형측구	300*400	m	99.0	105.0	증) 6

Ⅲ

건설사업관리기술단 검토의견

○ 경의선숲길 공원조성공사-신수동A구간 우수처리계획 변경에 대하여 검토한

결과 우수표면수 처리와 향후 유지관리 등을 감안, 적절한 것으로 판단되며

○ 변경 공사비는 계약심사 및 설계변경에 따른 계약 완료 후 계약단가로 수량

정산코자 함.

Ⅳ

보고자 의견

○ 『경의선숲길 공원조성공사』 신수동 A구간 우수처리계획 변경 실정보고에 대한 건설사업관리기술단의 검토의견이 타당하다고 판단되어 승인통보하여 차후 설계변경 시 반영토록 조치하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고서 1부.  끝.