문서번호	설비부-11603
결재일자	2015.9.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	09/18 박기형
협 조

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사」

기성부분검사(1회) 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.09.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사」

기성부분검사(1회) 결과 보고

『서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사』의 도급계약자가 본 공사에 대한 기성검사원을 감리단에 제출함에 따라 다음과 같이 책임감리원이 기성부분검사를 실시한 결과에 대하여 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선 전기공사

❍ 공사위치 : 서울시 용산구 한남동 ~ 동빙고동

❍ 공사기간 : 2015.03.02. ~ 2016.03.01.

❍ 계약금액 : 금799,205,000원

❍ 시 공 사 : 현대전기건설공사 대표 지은영

❍ 감 리 사 : 한국종합기술 대표 이강록

Ⅱ		기성부분검사 근거

❍ 전기공사 기성검사(1회) 결과 보고(책임감리원)

- 한국종합 2015-09-556호(2015.09.18)

Ⅲ		기성부분검사 내용

❍ 기성부분준공일자 : 2015.09.16( 기성부분검사원 접수 : 시공사 → 감리단)

❍ 기성부분검사일자 : 2015.09.17

❍ 기성부분준공금액 : 금388,125,000원

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성부분준공금액	금회 기성부분준공금액	남은 금액	비 고
전 체	금799,205,000원	금-원	금388,125,000원	금411,080,000원	기성율 48.56%

❍ 기성부분검사자 : 소속 (주)선진엔지니어링 직위 기술지원감리원 성명 정인준

❍ 기성부분검사내용 : 따로붙임 참조(기성부분검사 도서)

❍ 기성부분검사결과 : 공사설계서와 도면, 시방서, 기타 계약조건의 내용과     같이 이상없이 기성부분 준공됨.

Ⅳ		조 치 계 획

❍ 책임감리원이 실시한 기성부분검사결과와 같이 전기공사가 적합하게 기성부분 준공되었기에 건설총괄부에 통보하여 기성부분 준공처리하고자 함.

따로붙임 : 기성부분검사(1회) 도서 1부. 끝.