투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사)

1. 시설과-37(2014.01.06)호의 관련입니다.

2. 우리 부서에서 추진중인 「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사」 에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사

나. 공사기간 : 2013. 04. 15 ~ 2014. 01. 09

다. 도 급 액 : 금10,669,000원

라. 도 급 자 : (주)성림파워넷 대표 임성수

마. 준공기한 연기

-  당초준공기한 :  2014.01.09

-  변경준공기한 : 2014. 02. 17

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1) 준공기한연기 검토보고서 1부

2) 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	박진우		시설팀장	홍순철		시설과장	01/07 변규열
협조자
시행	시설과-50	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화		/전송	02-2181-1169	/	pjwooo@seoul.go.kr	/	대시민공개