문서번호	시설과-37
결재일자	2014.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
협조

『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사』 준공기한 연기 검토 보고

2014. 01.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인 『어린이대공원 놀이동산 재조성 사업 소방전기공사』 계약분에 대하여 아래와 같이 감독처로부터 ‘준공기한 연기 검토보고’가 있어 검토보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사

공사기간 : 2013. 04. 15 ~ 2014. 01. 09

도 급 비 : 10,669,000원

도 급 사 : (주)성림파워넷  대표 임성수

공사개요

- 화재수신기 1대,수동발신기 2대,경종3대,피난구유도등 14세트 등

감 독 처 : 시설관리공단 강북․공사관리처

Ⅱ		검 토 내 용

연기사유

-  건축 공기연장(’14.01.31)에 따라 후속 공정인 소방전기공사 공기연장이   불가피 함(향후 건축공사 진행사항에 따라 공사기간이 유동적임)

준공기한 변경

-  당초 준공기한 : 2014. 01. 09

-  변경 준공기한 : 2014. 02. 17.

지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		처 리 의 견

감독처로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단됨으로 계약    부서에 준공기한 연기 요청하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기요청 보고서  1부.  끝.