준공기한 연기조치 의뢰서

1. 공사내용

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성사업 소방전기공사

나. 도 급 자 : (주)성림파워넷 대표 임성수

다. 도 급 비 : 금10,669,000원

라. 계 약 일 : 2013. 04. 12

마. 착 공 일 : 2013. 04. 15

바. 준공기한 : 2014. 01. 09

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기 준공기한 : 2014. 02. 17

나. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 준공기한 연기사유

▷ 건축 공기연장에 따라 후속 공정인 소방전기공사 공기연장이 불가피 함.

2014.  01.    .

동부공원녹지사업소 시설과장   변  규  열(인)

서울특별시 동부공원녹지사업소 경리관 귀하