투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연장에 따른 계약변경 의뢰(백인제가 주생활전시관 전시연출 용역)

1. 전시과-3457(2015.10.8)호와 관련입니다.

2. 백인제가 주생활전시관 원형복원 공사관련하여 다음과 같이 준공기한을 연장 시행하고자 계약변경을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약번호 : 20150911186

나. 공사명 : 백인제가 주생활전시관 전시연출 용역

다. 계약자 : ㈜ 예인(대표 : 김대성)

라. 변경내용

- 준공기한 : 2015. 10. 16까지 연장(7일)

- 계약금액 : 변경없음

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
계약기간	2015. 9. 9 - 2015. 10. 9	2015. 9. 9 - 2015. 10. 16	7일 연장

마. 변경사유

- 관람형태 결정을 위한 시범개방 일정 추가로 개관일정이 10월말로 연기되었으며 이로인한 전시연출 변경을 위한 추가 소요(7일)가 발생하여 과업기간 연장이 불가피함

따로 붙임 : 1. 준공기한 연기의뢰서 1부

2. 준공기한 연장검토보고서.  끝.

	전시과장
주무관	김양균		전시과장	10/08 정명아
협조자
시행	전시과-3458	(		)	접수		(		)
우	03177	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr/
전화	02-724-0153	/전송	02-724-0255	/	cakra71@seoul.go.kr	/	대시민공개