문서번호	설비부-12638
결재일자	2015.10.14.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
박병환	김영수	10/14 박기형

『옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사』

설계변경 및 준공기한 연기 검토 보고

『옛 시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 전기공사』와 관련 시설관리공단으로부터 설계변경 및 준공기한 연기검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 드림.

관련근거

○ 설계변경 도서 및 준공기한 연기 검토 보고서 제출(공사감독3처-9517(’15.10.05.)호

○ 설비부-5958(‘15.05.20)업무지시(설계보완)

○ 설비부-9810(‘15.08.11)업무지시(실정보고 승인)

공사개요

○ 공 사 명 : 옛 시장공관 및 한양도성 순성길 전기공사

○ 위    치 : 종로구 혜화동 27-1

○ 규    모

- 전력인입 및 전력간선설비 1식, 전시실 동력,전등,전열설비 1식

- 비상경보설비 1식, 기타 전기부대공사 1식

○ 도 급 자 : ㈜태연  대표 곽미화

○ 도 급 비 : 108,657,600원

○ 공사기간 : 2015.03.25. ~ 2015.10.31.

설계변경 검토 보고

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 추가공사에 따른 물량 증·감으로 변경

○ 설계변경 내용

공 종	주요 설계변경 내용	비 고
전력간선 굴착공사	- 터파기 및 되메우기 물량 변경
옥외등 설비	옥외 조경등(보도등+투시등)36개 추가	신규
동력설비	- 화장실 및 장애인리프트 등 위치 변경
전열설비	변경된 건축 평면도에 적용 변경
전등설비	건축 평면도 변경 및 전시공간 조명등 추가
비상경보설비	건축 평면도 변경예 따른 위치변경
보행교	보행교 건설계획 보류로 설계내역 삭제

도급비 변경현황

[단위 : 원]

구 분	변 경 현 황		증·감	비고
	당 초	변 경
도 급 비	108,657,600	128,905,000	증20,247,400	설계내역서 참조

예산과목

○ 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존정비, 한양도성 탐방안내센터 확보사업

준공기한 연기 검토 보고

준공기한 연기사유

○ 선행공종인 건축공사 마감재 해체 후 건축부 안전기술단 자문회의 결과 반영을 위한 재설계 및 현장 당면사항 처리(흰개미 발견) 등 으로 공사지연 됨.

○ 건축공종 추진에 맞춰 공사 준공기한을 참조하여 6개월 범위내 준공기한 연기 필요.

준공기한 연기검토

○ 당 초 : 2015. 10. 31

○ 변 경 : 2016. 04. 30(6개월 연장)

○ 준공기한 연기에 따른 귀책소재 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

보고자 검토 의견

설계 변경건은 내역서를 검토한 결과 적정한 것으로 판단되고,

준공기한 연기는 선행공종(건축) 지연으로 후속공종인 전기공사 준공기한을 연기하여 공종관리에 철저를 기하고자 하며,

건설총괄부에 계약금액 변경 및 준공기한 연기 의뢰 조치코자 합니다.

붙 임 :  1. 관련공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.